문서번호	정보시스템담당관-9453
결재일자	2017.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정정보기획팀장	정보시스템담당관
이운심		이영순	08/08 代이영순
협조

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(8월1주차)

2017. 8.

정보시스템담당관

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(8월1주차)

사업개요

❍ 사 업 명 : 행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

❍ 사업기간 : 2017. 6. 1. ~ 2017. 12. 1.

❍ 계 약 자 : (주)시도우

❍ 사업금액 : 금113,000천원

주간 보고 내용

❍ 추진기간 : 2017. 7. 28. ~ 2017. 8. 3.

❍ 진 척 율

단계	계획	실적
전체	33%	23%
사업관리(착수)	100%	100%
분석	100%	21%
설계	100%	28%
구현	2%	0%
테스트	0%	0%
운영이관	0%	0%

❍ 추진실적

- 개발기획서 작성 및 검토

· 프로토타입 검토 과정에서 협의되지 않은 방향(그리드 미적용)으로
프로토타입이 구현되어 재작업 진행

- 프로토타입 재작업(그리드 적용)

- 분석․설계 산출물 작성

❍ 향후계획

- 프로토타입 구축(8.14 완료 예정)

- 분석․설계 산출물 작성 (8.18 완료 예정)

❍ 이슈사항

- 일정지연에 대한 조치 방안 => 인력 재배치 및 추가 투입 예정

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임 : 1. 주간업무 현황 보고서 1부.

2. 작업분할표(WBS) 1부.

3. 회의록 1부.  끝.