문서번호	도로보수과-8429
결재일자	2017.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
김경욱		08/08 김권일
협조

2017년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

제3차 작업관련 실정보고

2017. 08.

강서도로사업소

도로보수과

제3차 작업관련 실정보고

2017년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가) 3차 작업 내역 중 규제변경 및 현장여건에 따른 물량변경을 반영하여 시민의 안전을 도모하고 공사의 완성도를 높이고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 03. 13. ~ 2017. 12. 15.

○ 시 공 사 : ㈜성현이엔씨 대표 유 지 화

□ 보고내용

○ 규제변경 및 현장여건에 따라 3차 작업지시 물량 증감분 반영

연번	위치	작업내용	규격 및 지시물량		공사비 증감액
			변경 전	변경 후
1	신목로, 목동 힘찬병원 앞	무단횡단금지시설 철거	40경간	10경간	감) 1,954,500원
2	가마산로, 광명대교 진출입 토공부	경계석 정비	50개	145개	증) 11,647,190원
총 공사비 증감액					증) 9,692,690원

○ 변경사유

-신목로, 목동 힘찬병원 앞 : 규제사항 반려로 인한 시공물량 감소

-가마산로, 광명대교 진출입 토공부 : 최초 물량조사 시 누락된 정비물량 반영

□ 조치계획

○ 위 작업내역 변동사항을 3차 작업에 반영하여 시행하고자 함.

- 건    명 :‘17년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사 제3차 작업지시

- 작업위치 : 신목로, 목동힘찬병원 앞 등

- 작업기간 : 2017. 07 . 21. ~ 2017. 08. 18.

- 공종 및 물량 : “별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약 69,316천원 (실제 시공물량에 따라 추후 정산)

첨  부 1. 제3차 (변경)작업지시서 및 위치 현황 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.  끝.