문서번호	총무과-28297
결재일자	2017.8.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
석명오	代소영수	08/09 代김기봉

2017년도 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가)

설계변경(1차) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

총 무 과

2017년도 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가)

설계변경(1차) 검토 보고

2017년도 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가) 시행 중 계약물량 증․감 및 신규공종을 반영한 설계변경(제1차) 사항을 검토 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년도 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 4. 17. ~ 2017. 12. 31.

***********************************

**************************

○ 계약내용 : 식재 및 이식공사 등 19개 공종

□ 설계변경 사유 및 주요내용

○ 관련 근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건(행자부예규 제88호, ’17.4.11)

- 2017년도 청사 녹지대 유지보수공사(연간단가) 설계변경 적용단가 검토보고(총무과-28126, ’17.8.8)

○ 설계변경 사유

- 본관 서측 시청역 4번출구 느티나무 고사에 따른 교목 식재와 녹지대 내 관목 식재 등의 수량변경 및 신규공종에 대해 계약물량 변경 및 신규공종을 추가 계약하고자 함

○ 설계변경 주요내용

- 지하철 4번출구 느티나무(R20) 고사에 따른 제거 및 교목 식재

- 식재 공사 중 현장 상황에 따른 설계수량 변경(증감)

- 주요 변경내용

구 분	주요 변경내용	수 량		비 고
		변경 전	변경 후
물량증가	영산홍 식재	900주	1,610주	1공종
물량감소	한지형롤잔디 식재	500㎡	400㎡	16공종
신규비목	느티나무(R20) 식재	0주	1주	4공종

- 국민건강 및 연금보험의 사후 정산

▸ 지방자치단체입찰및계약집행기준(행정안전부예규 제88호, ’17.4.11)

제1장 제8절에 따른「보험료 사후 정산」

○ 설계변경 금액

*********************************

*******************************

○ 계약기간 변경

당 초	2017. 4. 17 ~ 2017. 12. 31
변 경 후	변 경 없 음

□ 설계변경 적용단가 합의내용

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정(지방자치단체공사계약일반조건.Ⅶ)

▸ 물량 증․감 : 계약단가 적용

▸ 신규비목 : 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰율(87.75%)을 곱한 금액의 범위안에서 협의 결정

□ 향후일정

○ 상기와 같이 설계변경을 시행하고, 변경 계약 체결 후 1차 기성

준공정산 및 녹지대 유지관리 업무에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 합의각서 1부.  끝.