★

문서번호	문화체육과-23756
결재일자	2017.8.10.
공개여부	대시민공개

담 당	시설관리담당	문화체육과장		복지문화국장
남창림	이기영	장순봉		08/10 손정수
협 조

장위동 김진흥 가옥

사랑채 보수정비공사 추진계획

2017. 8.

복지문화국

문화체육과

장위동 김진흥 가옥

사랑채 보수정비공사 추진계획

서울시 지정문화재 민속자료 제25호 장위동 김진흥 가옥 사랑채에 대한 보수정비를 공사 중첩으로 인한 혼잡을 방지하기 위하여 문간채 정비 완료시점(2017. 9월말)에 맞춰 보수정비공사를 시행하고자 함.

□ 추진근거

○ 서울시 문화재보호 조례 및 2016년 시지정 문화재보수정비 사업 지침

□ 추진경위

○ 2016.  6. 14. : 예산교부

○ 2016. 10. 18. : 실시설계용역 시행

○ 2017.  5. 31. : 설시설계용역 완료

○ 2017.  6. 31. : 일상감사 완료

□ 추진계획

○ 사 업 명 : 장위동 김진흥 가옥 사랑채 보수정비공사

○ 사 업 비 : 96,825천원

○ 사업기간 : 2017. 9. ~ 2017. 12.(3개월)

○ 사업내용 : 사랑채의 협문 및 담장 보수정비, 별당 배수정비

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰

○ 입찰자격 :「문화재수리 등에 관한 법률」에 의한 문화재수리업중 보수단청업면허 보유업체로서 입찰 공고일 전일부터 입찰일까지 주된 사무실을 서울시에 두고 있는 업체

○ 예산과목 : 문화체육과, 문화예술진흥 및 문화유산보존전승, 살아있는 전통문화유산 보존 관리, 장위동 김진흥 가옥 사랑채 보수정비공사, 민간자본이전, 민간자본사업보조(명시이월).

□ 행정사항

○ 김진흥 가옥에서 시행되는 부마축제의 원활한 추진을 위하여 축제 후에 착공될 수 있도록 조정하여 추진.

붙임  1. 설계설명서 1부.

2. 설계도면 1부.  끝.