투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구) 변경 계약의뢰(총괄2회, 1차3회)

신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)과 관련하여 물가변동 및 감리원 투입계획 조정으로 인하여 아래와 같이 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(3공구)

나. 계 약 자 : ㈜수성엔지니어링 외 2개사

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄	2011.11.01 ~ 2021.09.07	2011.11.01 ~ 2022.03.07	증) 180일
1 차	2011.11.01 ~ 2017.08.10	2011.11.01 ~ 2017.09.09	증) 30일

라. 용역금액 조정 내역

(단위 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	사 유
총괄 (2회)	2,504,320,000	2,524,670,000	증)20,350,000	- 감리원 투입계획 조정 및 물가변동률 반영
1차 (3회)	376,000,000	376,000,000	-	- 감리원 투입계획 조정

마. 예산과목

- 신교통수단도입, 경전철 건설사업, 신림선 경전철 건설, 시설비 및 부대비, 감리비(도시철도특별회계)

붙  임   1. 계약금액 조정 검토보고서 1부(별도송부)

2. 감리 변경설계서(총괄 2회 및 1차 3회) 각 1부.

3. 총괄 2회 변경설계서 1부(별도송부)

4. 1차 3회 변경설계서 1부(별도송부)

5. 합의각서 1부.(별도송부)  끝.

	도시철도사업부장
주무관	신익현		신교통1과장	代임병길		도시철도사업부장	08/10 박동룡
협조자	주무관	임병길		경리과장	代김용범
시행	도시철도사업부-8641	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스빌딩(9층)	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7189	/전송	02-772-7305	/	caram00@seoul.go.kr	/	부분공개(5)