문서번호	설비부-8814
결재일자	2017.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
백남진		임현근	전결 05/26 권오식
협조

설 계 변 경 검 토 보 고

『동부간선도로확장3공구 통신공사(3차)』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 05.

설 계 변 경 검 토 보 고

『동부간선도로확장3공구 통신공사(3차)』

「동부간선도로확장 3공구 통신공사(3차)」와 관련하여 건설관리사업단으로부터 설계변경 및 공사기간 단축 요청이 있어 검토 드림

1		관련근거

□ 통신공사 설계변경 및 공기단축 요청 : 동삼감 제2017-1187호(2017.5.22.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 동부간선도로확장(3공구)통신공사전기공사

□ 공사위치 : 상계주공16단지~의정부시계간 2.25km내 지하차도 2개소

□ 공사기간

- 총차 : 2015. 05. 01. ~ 2017. 12. 31.

- 3 차 : 2016. 01. 20. ~ 2017. 12. 31.

□ 도 급 비 : 총차 37,125,000원, 3차 25,091,000원

□ 시 공 사 : 이엔트컴(주) 대표 백석환

□ 감 리 사 : 동부ENG(주)

3		검토내용

□ 변경내용

□ 방음벽 기초공사(토목분야)관련하여 지장물(ITS시설 광케이블)이설

(설비부-353 2017.01.09.) - 증 44,000천원

∙ 광케이블 철거(SM-2C,4C,16C) : 790m

∙ 광케이블 포설(SM-2C,4C,16C) : 790m

∙ 전선관 철거(ST28㎜,36㎜,54㎜) : 1,282m

∙ 임시관로 설치(ELP) : 641m

∙ 광접속함체 설치 및 광케이블 접속 : 1식

□ 선행공종(토목) 지연으로 장암전기실~상도전기실간 광케이블 시공 불가(2017년 12월까지) : 감10,000천원

⇒ 대책 : 향후 2017년 이후 토목공사 재개시 방음벽구간 통신공사업체에 작업지시

∙ 장암~상도전기실간 광케이블  790m

∙ 장암전기실~장암지하차도간 옥외통신공사(전선관 및 케이블 설치) 1식

□ 통신공사 : 총 차

단위 : 원

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	37,125,000	64,406,000	증 27,281,000
공사기간	2015. 05. 01. ~ 2017. 12. 31.	2016. 05. 01. ~ 2017. 05. 31.	공기 7월 감

∙ 통신공사 : 3차

단위 : 원

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
도 급 비	25,091,000	62,281,000	증 37,190,000
공사기간	2016. 01. 20. ~ 2017. 12. 31.	2016. 01. 20. ~ 2017. 05. 31.	공기 7월 감

□ 준공기간 단축사유

선행 토목분야의 공사 지연(중단)으로 통신공사가 2017.12.31.일 까지중단이 예상되는 바 시공사의 요청에 의해 타절 준공

□ 감리단 검토의견

ITS시설 광케이블 이설과 장암전기실~상도전기실간 광케이블간 설계내역이 적정하게 반영되였으며, 향후 미시공분 토목공사 재개시 방음벽구간 통신공사(ITS시설공사)에 포함 시공

4		조치계획

□ 건설사업관리기술단으로 부터 제출된 설계변경 내역 검토보고가 타당한 것으로 사료되어 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 통신공사 설계변경 요청 1부.  끝.