문서번호	급수운영과-19504
결재일자	2017.8.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
이철	이경희	최철민		08/14 전영석
협 조
	시설관리과장		김기상

공정보고회(8월) 개최결과 보고

2017. 8. 14.

남부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공정보고회(8월) 개최결과 보고

우리 사업소에서 시행 중인 송,배급수관정비공사에 대한 8월 공정보고회 개최결과를 보고 드림

1		보고회 개요

□ 일 시 : 2017. 8. 14.(월) 15:00 ~ 16:10

□ 장 소 : 사업소 2층 회의실

□ 대상사업

○ 난곡사거리 ~ 미성초등학교간 송배수관 정비공사 외 8건

□ 참석자(26명)

○ 사 업 소(14) : 급수운영과장 외 13명(사업별 업무담당자 배석)

○ 시설공단(4) : ****차장 외 3명

○ 현장관계자(8) : ****** 현장대리인 *** 외 8명

□ 회의안건

○ 사업 추진실적 보고

○ 밀폐공간 질식사고 예방 수칙 교육

○ 공사장 안전관리 및 대책에 관한 사항

2		공정현황

(2017.8.14.기준)

연번	공 사 명	시공업체	공사기간	공사개요		사업비 (백만원)	추진실적			담당
				구경 (㎜)	연장 (m)		부설 (m)	공정율
								실적	계획
계				80～800	16,827	15,747	6,020
1	가산동 470-1~680간 외 1개소 송배수관 정비공사	*****	2017.5.1.~ 12.31.	80~600	2,145	1,860	326	20%	25%	***
2	난곡사거리 ~ 미성초등학교간 송배수관정비공사(특화사업)	*** ******	2017.5.18.~ 12.16.	600~800	800	1,600	220	25%	10%	***
3	신길우성3차아파트앞 ~ 구로디지털단지 송배수관정비공사	******	2017.5.18.~ 12.16.	800	900	2,300	132	8%	8%	***
4	가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사	*********	2017.4.25.~ 12.26.	80~300	2,280	1,780	1,134	50%	45%	***
5	서원동 10번지 주변외 1개소 배급수관 정비공사	*** *****	2017.5.2.~ 12.27.	80~200	2,116	1,616	744	35%	39%	***
6	은천동 959-8번지 주변외 3개소 배급수관 정비공사	****	2017.4.26~ 12.5.	80~300	1,743	1,243	450	26%	285	***
7	대림동 681-5~688-2외 6개소 배급수관정비공사	*****	2017.4.20.~ 12.23.	80~300	2,385	1,885	1,210	62%	47%	***
8	여의도동 15~15-3외 8개소 배급수관정비공사	****	2017.4.28~ 12.13	80~300	2,394	1,899	854	39%	33%	***
9	신대방동 346-25~342-87외 7구간 배급수관정비공사	******	2017.4.28.~ 2018.1.6	80~300	2,064	1,564	950	60%	20%	***

3		주요 지시사항

□

공 사 관 리

○ 공정 부진 공사장은 공정관리를 재검토하여 하반기 공정관리에 문제가 발생되지 않도록 검토하고 관리철저

- 각 공사장별 기존관 철거를 전 구간 철거를 목표를 추진하고, 9월 공정보고시 공사장별 기존관 철거율 보고할 것

○ 공사 중 발생할 수 있는 예기치 못한 상황에 대비할 수 있도록 사전 대비 철저

- 각종 민원 및 유관기관 협의사항 등 대비 철저

- 야간공사(간선도로) 포장복구는 사전에 복구사항을 확인 시행

○ 추석 연휴가 장기간으로 공정관리에 철저를 기하고, 공정이 우려되는 현장은 구간별 일정을 재 조율하여 공사 진행하도록 할것

○ 각 공사장별 밴드를 활용하여 현장 발생상황을 적시에 대처될 수 있도록 적극적으로 활용할 것

○ GIS 측량은 부설완료 후 측량이 이루어지지 않도록 공사전 측량될 수 있도록 하여 정확도 향상이 이루어지도록 할것

□

공사장 안전관리

○ 밀폐공간 질식사고 예방관련 안전수칙 준수

- 맨홀 내 작업 계획시는 사전 ‘밀폐공간 작업메뉴얼’에 적합하도록 공사전에 인력교육을 실시

- 산소농도측정 장비 등을 사전 활용하여 적정산소 여부 확인 후 작업계획에 적합하도록 진행

- 안전은 ‘사후’가 아니 ‘사전’에 예방을 철저하게 하는게 최소의 비용으로 최대의 효과가 발생됨

- 맨홀 작업 계획이 있는 현장은 「상수도맨홀 안전보건 작업일지」를 작성하고 작업할 것.

○ BAND를 통한 현장감독 절차 공유 및 확인,점검 철저

- 각 공사장별 감독자, 현장대리인, 사업소 업무담당, 팀장 등 현장별 공유로 안전위해요인 사전 제거하도록 할 것

□

청렴도 향상

○ 건전한 소통문화를 통해 공사업체와 감독자간 상호 신뢰성 제고

○ 부정한 행위 등 청렴관련 위반 사항이 발생되지 않도록 철저한 관리

- 부정청탁 및 금품수수 금지에 관한 법률 준수

4		향후계획

□ 8월 공정보고회 개최결과 시설공단 통보

○ 공정보고회 결과 내용을 시설공단에 조치토록 통보.

공 정 보 고	밀폐공간 질식사고 예방 교육

붙임  1. 공정보고(회의자료) 1부.

2. 밀폐공간 작업매뉴얼(교육자료) 1부.  끝.