함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 성동청소년수련관 기능보강사업 사업계획변경 승인 통보

1. 시립성동청소년수련관 업무지원팀-1373(2017.7.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 2017년 시립청소년수련시설 기능보강사업비 집행계획(청소년담당관-3926,2017.2.21.)변경승인 신청한 사항에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 기능보강사업 추진에 차질 없도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명: 2017년 시립성동청소년수련관 기능보강사업

나. 변경내용

(단위 : 천원)

**	***		***		비고
	***	***	***	***
**		127,000		200,700	사업변경에 따른 추가분 73.7백만원 예비비 교부
1	수영장 안전그물망 설치	2,761	수영장 안전그물망 설치	2,761	기 교부
2	수영장 천장 패널 설치	2,789	수영장 천장 패널 설치	2,789
3	제습공조기 전기 공사	7,150	제습공조기 전기 공사	7,150
4	샤워실 배수관 교체	3,030	샤워실 배수관 교체	0	자체예산 실시
5	수영장 복도 누수	6,600	수영장 복도 누수	0
6	폐수열탱크 교체	20,000	폐수열탱크 교체	0
7	온도조절장치 교체	7,000	온도조절장치 교체	0
8	수영장 복도 타일 보수	13,881	수영장 복도 타일 보수	0	추후 공사 예정
9	수영장 보일러 및 배관 교체	63,789	수영장 기계설비 공사	188,000	샤워실 넘침현상으로 민원 해소 및 안전사고 예방 위해 공사 실시 ※ 전면교체로 124,211천원 증대

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시청소년시설협회장,시립성동청소년수련관장
주무관	차인석		청소년시설팀장	최형대		청소년정책과장	08/14 代권명희
협조자
시행	청소년정책과-2701	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동, 서울시청 서소문별관)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4126	/전송	02-768-8829	/		/	대시민공개