투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	체부동 생활문화센터 조성공사 석면 해체·제거 공사 변경계약 의뢰

우리 본부에서 시행중인「체부동 생활문화센터 조성공사 석면 해체 · 제거 공사」에 대하여 아래와 같이 변경계약 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 체부동 생활문화센터 석면 해체·제거 공사

나. 공사기간 : ‘17.07.05. ~ ‘17.09.10.

다. 계약금액 : 12,650,000원

라. 계 약 자 : ㈜아이엔지환경개발

마. 계약변경 내용

(단위 : 원)

계약금액	총차	당초	**********
		변경	**********
		증.감	***********
계약기간변경	총차	당초	2017.07.05.~2017.08.11
		변경	2017.07.05.~2017.09.10
		증.감	증)30일

바. 예산과목 : 도시개발특별회계, 문화본부 문화정책과, 문화도시 서울 구현, 문화기반시설 조성, 체부동 성결교회 매입 및 활용, 시설비

붙 임 : 1. 계약변경 검토보고서 1부

2. 계약변경 요청서 1부

2. 변경계약 내역서(당초, 변경) 각 1부

3. 합의각서 1부.

4. 감리검토 의견서 1부. 끝.

	건축부장
주무관	박윤수		문화시설과장	최달수		건축부장	08/14 김진용
협조자
시행	건축부-14033	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)