문서번호	시설과-7304
결재일자	2017.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
라승보		김도섭	전결 08/14 강신재
협 조

『국사봉배수지 건설공사 혼합건설폐기물 처리용역』

설계변경 실정보고에 대한 검토

2017. 8.

상수도사업본부

(시 설 과)

『국사봉배수지 건설공사 혼합건설폐기물 처리용역』

설계변경 실정보고에 대한 검토 보고

『국사봉배수지 건설공사』에서 발생되는 혼합 건설폐기물의 실제 처리 수량을 반영한 (최종)설계변경에 대한 검토 보고임.

※ 관련문서 :대한(국사관리단) 제2017-177호(2017. 8. 14.)

용역개요

○ 용 역 명 : 국사봉배수지 건설공사 혼합건설폐기물 처리용역

○ 용 역 사 : 운반업체  ㈜강동환경, 처리업체  ㈜현대환경

○ 용역기간 : ’17. 05. 26. ～ ’17. 8. 23.

○ 용 역 비 : 315,770,000원

○ 계약수량 : 운반 및 처리 6,003톤

설계변경 현황

○ 변경사유 : 현장여견 변동에 따른 폐기물 발생량 감소(감 2,442톤)

- 발주시 폐기물량 산정을 7개소 시험굴착하여 확인된 매설깊이(1~4m)를 근거로 추정하였으나, 실제 굴착 결과 폐기물이 불연속적으로 매립되어 있어 폐기물 발생량이 감소함.

○ 금액변경(감 128,469천원)

구 분	단위	총 괄 분		증‧감
		당 초	변 경
처 리 량	톤	6,003	3,561	감)2,442
용 역 비	천원	315,777	187,308	감)128,469

조치의견

○ 위 사항에 대하여 변경계약 의뢰코자 함.

계약의뢰처 : 본청 재무국 재무과

붙임 : 건설폐기물 처리용역 정산변경 실정보고 및 내역서 각 1부. 끝.