투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017 서울대공원 산림욕장길 정비공사 설계변경 시행

1. 조경과-4771(2017.8.11.)호와 관련입니다.

2.『2017 서울대공원 삼림욕장길 정비공사』추진과 관련 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017 서울대공원 삼림욕장길 정비공사

나. 공사내용 : 쉼터2, 목교4, 목계단, 안전난간 설치 등

다. 공사기간 : 2017. 6. 12 ~ 2017. 8. 21

라. 총공사비 : 173,289,500원(도급액 159,997,500, 관급비 13,292,000)

마. 도 급 사 : 효원랜드(주) 대표 권민정

바. 변경내역

구 분		금 액		증 감
		당 초	변 경
총공사비		159,997,500	182,443,900	22,446,400
도급액	공급가액	145,452,273	165,858,091	20,405,818
	부가가치세	14,545,227	16,585,809	2,040,582
	계	159,997,500	182,443,900	22,446,400

사. 예산과목

- 서울대공원 총무과, 공원이용 시민만족도 향상, 공원관리 시민참여 확대와 이용활성화, 산림내 이용시설 및 조경관리, 산림내 이용시설 정비 및 관리, 시설비 및 부대비(시설비)

붙임  1. 설계변경 사유서 및 변경설계서 각 1부.  2. 제비율 검증 1부.

3. 계획서 1부.

주무관							김근주				조경과장					08/17 강인호
협조자				주무관							정한성					총무과장							이행용
시행			조경과-4578										(						)		접수												(						)
우	13829					경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동) 서울대공원 조경과																/			http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		02-500-7550							/전송			02-500-7993					/	kimgj3950@seoul.go.kr													/	부분공개(4,7)