문서번호	설비부-13974
결재일자	2017.8.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	08/17 권오식
협 조

- 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업 -

물순환 테마파크 옥외 경관조명설비 변경 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 08.

도시기반시설본부

설비부

- 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업 -

물순환 테마파크 옥외 경관조명설비 변경 검토

본 공사진행 중 중랑물재생세터내 물순환 테마파크 조성공사 진행중 조경공사 도면이 변경됨에 따라 당초 계획한 옥외 경관조명설비에 발생한 변경사항에 대하여 책임건설사업기술자의 설계변경 검토 보고가 있기에 다음과 같이 조치하고자 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업

○ 공사규모 : 시설현대화 25만㎥, 고도처리 88만㎥, 중랑용수공급시설 20.3만㎥

○ 공사기간 : 2009.02. ~ 2017.04.

○ 공사비 : 금335,283백만원

○ 계약자 : GS건설(주) 외 2개사

○ 감리사 : 한국종합기술 외 1개사

○ 공사 및 계약방식 : 설계·시공 일광입찰방식(Fast Track)

2		설계변경 내용

□ 변경발생 근거

○ 조경도면 확정에 의한 옥외 경관조명설비 변경에 대한 검토 보고

: 한종(중랑)감 제17-209호(`17.08.10)

□ 설계변경 내용

○ 중랑물재생센터 물순환 테마파크내 옥외 경관조명설비 변경 사항 발생

- 물순환 테마파크내 조경공사 도면이 변경 확정됨에 따라 당초 계획한 옥외 경관조명설비에 계약물량 증감 사항이 발생함.

※조경조면 변경내용 : 당초(숨박꼭질터, 사계절스케이트장) → 변경(연못)

○ 설계변경 세부내용

공정	규격	단위	수량		증·감	비 고
			변경전	변경후
가로등	LED60W	개	17	22	증)5
벽부등	LED1.6W	개	34	0	감)34
LED Point등	1W	개	40	0	감)40

- 옥외 경관조명 변경전·후 도면

변경전	변경후

□ 설계변경 증감내용

○ 공종 : 옥외경관조명설비(12차 공사분)

공종	변경전(원)	변경후(원)	증·감(원)	비 고
1.직접공사비	254,865,306	261,206,268	6,340,962	증
2.제경비	81,464,694	84,423,732	2,959,038	증
3.합계	336,330,000	345,630,000	9,300,000	증
4.ESC(1회~4회)	45,862,000	47,132,000	1,270,000	증
5.도급비(옥외경관조명설비)	382,192,000	392,762,000	10,570,000	증

3		보고자 조치의견

□ 본 공사진행 중 물순환 테마파크 조경도면 변경으로 옥외경관조명설비 공종에 발생한 당초 계약물량 증·감 사항 처리를 위한 책임 건설사업기술자의 검토 실정보고가 적합하다고 판단되므로 설계변경 승인 조치하고자 함.

○ 설계변경(12차) 예정금액

- 전기 및 계장공사 도급비

구분	변경전(원)	변경후(원)	증·감(원)	비 고
12차	1,894,100,000	1,904,670,000	10,570,000	계약금액 증액

4		향후계획

□ 2017.08. : 설계변경 승인 및 시행

□ 2017.08.31. : 공사준공(12차 공사)

따로붙임 : 책임 건설사업기 검토의견서 1부. 끝.