투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(석재타일 및 판석) 규격 및 물량변경 요청(세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사)

1. itm 916 제17-0719(’17.08.14.)호와 관련입니다.

2.『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성공사』와 관련, 관급자재(석재타일 및 판석) 물량을 아래와 같이 변경요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 규격 및 물량변경 요청내역

계약번호 (납품요구번호)	단위	변경 전			변경 후			증·감
		규격	단가	물량	규격	단가	물량	수량
00165005502 (12-17-1-25511-00)	㎡	자연석판석, 회백색류(포천석),버너, t50㎜	41,600	387	자연석판석, 회백색류(포천석),잔다듬, t50㎜	49,600	811	증) 424
		자연석판석, 회백색류(포천석),버너, t100㎜	76,900	537	자연석판석, 회백색류(포천석),잔다듬, t100㎜	94,100	1,280	증) 743

나. 사  유 : 포장계획 변경으로 인한 물량변경

붙임 : 1. 물량변경 계약 검토보고 1부.

2. 건설사업관리단 공문    1부.

3. 관급자재 변경 품목     1부.  끝.

	건축부장
★주무관	조문석		환경시설과장	유현수		건축부장	08/18 김진용
협조자	주무관	시희식
시행	건축부-14303	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2646	/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개(5)