함께해요 을지연습!, 튼튼해요 국가안보!
		서울특별시
수신	(주) 유신 대표이사 성낙일 귀하
(경유)
제목	지반조사 계획 및 실정보고에 따른 회신

1. ㈜유신 도로-17-3192호(2017. 8. 18.)와 관련입니다.

2.『태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계 용역』관련 지반조사 계획 및 실정보고에 대해 다음과 같이 회신합니다.

가. 지반조사 계획 및 실정보고 내용

지반조사	조사항목	실정보고 사유	비 고
실내 토질시험	CBR시험	노상토 지지력를 파악하여 현장 발생토 유용성 평가에 활용 (계약 시험 횟수 0 → 3회)
	입도분석,체가름,액성한계 시험 등(6종)	실내 토질시험 물량 조정 (계약 시험 19 → 22회)
현장시험	공내재하시험 (Elastmeter, GMJ)	지반변형계수, 수평지반반력 계수를 파악하여 말뚝기초, 가시설 설계 및 각종 수치해석에 활용 (계약 시험 0 → 5회)

나. 지반조사 계획 및 실정보고 관련 승인조건

1) 지반조사 전에 도로관리기관과 사전협의 및 지하시설물(송수관로 등) 관리기관 담당자 입회하에 보링작업을 실시하여 안전사고가 발생하지 않도록 할 것.

2) 보링깊이 및 현장시험 횟수 등은 적정하게 수행하고 보링 위치별로 보링수량을 정산할 수 있도록 지반조사후 보고할 것.

3) 지반조사 시험장비는 공인(검정)된 시험장비로 시험할 것.

4) 추후 국토지반정보 통합DB센터 시스템(https://www.geoinfo.or.kr)

에 지반조사 결과를 입력하고 보고할 것.  끝.

							서 울 특 별 시 장
★주무관							김영백			광역도로계획팀장					박영서					도로계획과장					08/18 하종현
협조자
시행			도로계획과-11904									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 신청사 10층 도로계획과															/
전화		02-2133-8087						/전송			02-2133-0763					/	kyb4321@seoul.go.kr												/	대시민공개