상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(3회차) [뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 폐기물처리 용역-7차]

1. 시설과-7401(2017.08.18.)호와 관련입니다.

2. 『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 폐기물처리 용역(7차분)』에 대한 (3회차)변경계약을 아래와 같이 체결하고자 합니다.

가. 계 약 자 :*************: 김봉숙

나. 용역개요

- 폐콘크리트처리(1,305TON). 폐아스콘처리(2,767TON)

- 건설폐재류(3,935TON), 혼합건설폐기물(62TON)

다. 계약기간 : 2010.08.10. ∼2017.08.20.

라. 변경계약 현황                                    (단위:천원)

구분	당 초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총차분	‘10.08.10.∼ ’17.08.20.	1,113,200	‘10.08.10.∼ ’17.09.30.	변경없음	-
7차분	‘16.07.01.∼ ’17.08.20.	87,285	‘16.07.01.∼ ’17.09.30.	“	-

마. 변경사유

- 현장사무실 존치가 필요함에 따라 폐기물 처리 용역기간 연장 필요

붙임 : 1. 변경계약 합의서 1부.

2. 변경계약 방침 보고서 1부.

3. 변경계약 의뢰 관련공문 1부. 끝.

주무관	김경식		재무회계과장	박병식		요금관리부장	조세연		상수도사업본부부본부장	08/18 구아미
협조자
시행	재무회계과-11287	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1231	/전송	02-3146-1209	/		/	부분공개(7)