문서번호	시설관리과-19007
결재일자	2017.8.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
이생기		08/21 박은선
협조

현장 실정보고에 따른 검토보고 (서초1교~진흥아파트간 배수관정비공사)

2017. 08.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장실정보고에 따른 검토보고

『서초1교~진흥아파트간 배수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울특별시시설관리공단으로부터 현장 공사실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.(공사감독2처 - 8635(2017.8.18)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 서초1교~진흥아파트간 배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 05. 30. ~ 2017. 10. 26.

***********************

라. 공사개요 : D=100~500mm,  L=500m

****************************

*************************************

바. 발 주 청 : 강남수도사업소 시설관리과

2		공단 보고내용

가. 현황

1) 차량통행이 빈번한 간선도로상 원형밸브실 받침을 기초재생PE로 설치    하도록 설계됨

- 설계물량 : 원형밸브실(기초재생PE) 18개소

나. 문제점

1) 상수도공사 설계 일반 지침서의 적용기준에 의하여 원형밸브실 설치시   설치장소가 간선도로등 차량통행이 빈번한 장소에는 기초콘크리트    받침을 설치하도록 되어 있으나 본 공사에는 기초재생PE로 설계되어   있어 서로 상이한 실정임

다. 검토의견

1) 상수도공사 설계 일반 지침서에 의거 간선도로상의 원형밸브실 받침은   기초콘크리트 받침으로 변경하여 시공하고 추후 정산처리 하는 것이    타당하다 사료됨

********************

3		실정보고 의견

가. 사업소 검토의견

1) 간선도로상의 원형변실 받침은 기초콘크리트 받침으로 변경시공하고   추후 정산처리 하는 것이 타당하다 판단됨.

3		조치계획

가. 위 검토의견과 같이 간선도로상의 원형변실받침을 기초콘크리트          받침으로 변경시공토록 하고 추후 설계변경시에 증액분에 대하여         반영토록 서울시 시설관리공단에 통보하여 공사 시행에 만전을          기 하고자 함.

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.