문서번호	정보시스템담당관-9898
결재일자	2017.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정정보기획팀장	정보시스템담당관
이운심		이영순	08/21 이기완
협조

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(8월2~3주차)

2017. 8.

정보시스템담당관

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(8월2~3주차)

사업개요

❍ 사 업 명 : 행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

❍ 사업기간 : 2017. 6. 1. ~ 2017. 12. 1.

❍ 계 약 자 : (주)시도우

❍ 사업금액 : 금113,000천원

주간 보고 내용

❍ 추진기간 : 2017. 8. 4. ~ 2017. 8. 17.

❍ 진 척 율

단계	계획	실적
전체	41%	32%
사업관리(착수)	100%	100%
분석	100%	31%
설계	100%	49%
구현	19%	0%
테스트	11%	0%
운영이관	0%	0%

❍ 추진실적

- 프로토타입 재작업(그리드 적용)

1) 미국 공공기관 웹표준 디자인 가이드 : 그리드 재분석 및 행정포털 적용 분석

2) 레이아웃 템플릿(디자인 파일)
- 1차 검토 (08.07)
- 2차 검토 (08.10)

3) 디자인 요소 보완 진행
- 검토회의 (08.10)
- 프로토타입 구현 사항 중간 검토 (08.10)

- 분석․설계 산출물 작성

1) 개발기획서 검토 회의(8.14)

2) 중간보고 자료 검토 회의(8.17)

❍ 향후계획

- 프로토타입 구축(8.21 완료 예정)

- 중간보고서 작성(8.22 완료 예정)

❍ 담장자 의견

- 일정 지연 및 PM 부재 이슈

․ 프로토타입 개발 완료일자가 계획은 7월31일 이였으나 8월 21일 완료 예정으로 약 3주 일정이 지연 상태(계획 : 41%, 실적: 32%)

․ PM 교체 후 인수인계 기간 중 능력 부족 사유로 철수

- 해결방안(인력 조정 등)을 8월21일까지 제시할 예정

붙임 : 1. 주간업무 현황 보고서 2부.

2. 회의록 2부.

3. 작업분할표(WBS) 1부.  끝.