문서번호	생산관리과-10535
결재일자	2017.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생산관리과장	생산부장
이규현	한희선	08/22 유성종

「정수슬러지 친환경 재활용 기술개발 관련」

'17년 사업계획 관계자 회의 결과보고

2017. 8.

상수도사업본부

(생산부)

- 정수슬러지 친환경 재활용 기술개발 관련 -

사업 관계자 회의 결과보고

정수슬러지 친환경 재활용 기술개발과 관련하여 우리본부와 공동으로   사업에 참여하고 있는 2개업체와 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		사업개요

목    표 : 정수슬러지 친환경 재활용기술 개발을 통한 처리비 절감

사업기간 : ’11. 8. ~ 업체 기술개발 진행에 따라 지속 추진

민간공모를 통하여 정수슬러지 재활용기술 개발 업체 선정

연번	기 업 명	주 소	사업분야
1	㈜청우에코건설	서초구 양재1동 138	투수성 포장재 및 점토벽돌
2	㈜넥스트윜	금천구 가산동 371	조습성 건축마감 및 내장재

Ⅱ		그동안 사업추진내용

기술 개발 참여업체 선정 : ’11.5

실증플랜트 운영 : '11. 12 ~ '13. 3

운영관리 및 최종기술선정 학술용역 시행 (서울연구원) : '12. 5 ~ ’13. 12.31

업체별 시제품에 대한 평가 (한국화학융합시험연구원외) : '12. 11 ~ '13. 3

- 도로포장재, 건축마감타일 (KS기준에 적합하며, 인체 유해성으로부터 안전)

재활용 기술개발 관련 발명 공동특허3건 서울시 직무발명 승계 : ’13. 3.

서울시 보도블럭 엑스포 참가(정수슬러지 50% 포함 투수블록) : ’13년, 14년

정수슬러지 재활용 포장 시범시공: '14.9 ~ ’14. 11

- 정수센터 3개소 고도정수시설 부지에 시범시공

구 분	계	강북정수센터	암사정수센터	구의정수센터
시공내용	10,019㎡	투수흙콘크리트690㎡	투수블록 1,530㎡	투수블록 6,729㎡
시공시기	’14.19~14.11	2014. 9	2014. 10	2014. 11
예산절감액	159,563천원	15,118천원	26,445천원	118,000천원

종합 재활용업 허가 획득 및 공장 건설 중 : 15. 6 ~

- 넥스트윅(경기도 여주) :  공장 및 설비 도입을 위한 준비중 (자금부족으로 지연)

- 청우에코건설(용인) : 공장 설립중으로  ’17. 8월 준공예정

※ 2개업체 모두 종합페기물 처리업 및 지자체의 공장등록 허가 등은 득한 상태임

Ⅲ		회의개요 및 결과

일  시 : ’17. 7.25(화) 10:00~12:00 생산부 회의실

참석자 : 생산관리과 담당자, 청우건설 및 넥스트윅 관계자

회의주제

-  업체별 사업 진행사항 및 공장 신설 추진현황

-  암사, 강북정수장 정수슬러지 배출계약관련 진행사항 협의

회의결과

-  '17년 정수슬러지폐기물 재활용 처리 용역 운영가능 여부

․청우건설 : 약 2만톤/년  11월부터 처리 예상, ’17. 10월부터 공장가동 예상됨

(당초 17.8월 부터 재활용 목적으로 슬러지 반출예정이었으나 사업지연)

․넥스트윅 : 공장부지는 확보하였으나, 설비 도입을 위한 은행권 협의가 어려워 사업

추진이 불투명한 실정  (강북정수장 재활용 슬러지 배출은 불가할것으 보임)

-  암사정수센터 정수슬러지폐기물 배출계약 조정 추진 (암사정수센터 시행)

․정수슬러지 폐기물 배출용역 설계변경 : 계약 잔여물량 중 약30%를 청우건설에 배정

․청우건설의 배출시기가 1월에서 11월로 지연됨에 따라 폐기물 물량 변경계약 필요

추진 애로사항

-  참여업체가 중소기업으로 흙콘크리트 및 투수블록 등 생산제품은 KS기준 등을  만족하나, 자금 부족 등으로 적극적인 사업 추진에 애로가 있음

․넥스트윅은 현재 금융권의 사업 자금 대출규제 등의 문제로 향후 사업 추진이 불투명 함

Ⅳ		향후계획

정수슬러지 재활용 처리관련 처리단가 협의 : ’17. 9월

- 암사정수센터 처리물량의 계약 잔여물량 중 약30%를 청우건설(주)에  처리토록 추진

- 기존 폐기물 처리 단가보다 절감된 단가로 지정 계약 추진

정수슬러지를 생산재료로 재활용 시작 : ’18. 1월 예상. 끝.