문서번호	시설보수과-7411
결재일자	2017.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
		시설보수과장
오광준		08/22 이근봉
협조

실정보고사항 검토결과 보고

(화계천 복개구조물 보수공사)

2017. 8

북부도로사업소

(시설보수과)

실정보고사항 검토결과 보고

(화계천 복개구조물 보수공사)

우리사업소에서 시행하고 있는 『화계천 복개구조물 보수공사』에 대해 감독기관인 서울시설공단의 실정 보고 사항에 대한 검토 보고 임.

관련근거

❍ 시설관리공단 공사감독2처–8426(2017. 8. 16.) 실정 보고서 제출 건

공사현황

❍ 공 사 명 : 화계천 복개구조물 보수공사

❍ 공사기간 : 2017. 6. 9. ~ 2017. 12. 31.

❍ 도 급 액 : 593,852,000원

❍  공사개요  :  단면보수 1,952㎡, 주입보수 387m, 조인트 보수 117m

❍ 도 급 자 : ㈜엘앤케이시설물 대표 임수규

실정보고 내용

❍ 암거내부 보수물량에 대한 현장 전수조사에 따른 물량 변경 반영

공 종	단 위	수 량			비 고
		당초	변경	증 감
단면보수 (t=50mm/바닥)	㎡	1,163.7	1,117.4	감)46.3
조인트 보수(벽체)	m	59.9	68.9	증)9
조인트 보수(천정)	m	56.6	50.3	증)6.3

❍ 암거 바닥부 열화단면 제거공 등 설계누락분 반영

공 종	단 위	수 량			비 고
		당초	변경	증 감
콘크리트 절단	m	1,577	2,452.9	증)875.9
콘크리트 열화단면제거(착암기)	㎥	-	33.522	증)33.522
암거내 소운반	ton	172.06	112.297	감)59.763
폐기물 인상	ton	172.06	112.297	감)59.763

❍ 공사비 증·감

구 분	공 사 비(천원)			비 고
	당초	변경	증 감
공급가액	529,867	553,100	증)13,233
부 가 세	53,986	55,310	증)1,323
도 급 액	593,853	608,410	증)14.556

조치사항

서울시설공단의 의견과 같이 처리토록하고 추후 설계변경시 공사금액내(배정)에서 물량변경 반영 조치

검토결과를 서울시설공단에 통보

붙임 : 실정보고서 공문 1부.  끝.