문서번호	도시공간개선단-10916
결재일자	2017.8.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
★주무관		도시공간정책팀장		도시공간개선반장
임종현		신동권		08/22 안재혁
협 조

서울시 공간정책투어 홍보물 제작 용역 계약변경 계획

2017. 08.

도시공간개선단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	■	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

서울시 공간정책투어 홍보물 제작

용역 계약변경 계획

「서울시 공간정책투어 홍보물 제작」용역을 추진하는 과정에서 추가검토 사항 등이 요구됨에 따라 계약기간을 연장하여 과업의 질을 높이고자 함.

용역개요

1

❍ 용 역 명 : 서울시 공간정책투어 홍보물 제작

❍ 용역기간 : 2017.05.29. ~ 2017.08.31.

*******************************************

***************************************

❍ 과업주요내용

- 기존 분류체계를 스토리텔링으로 재해석

□공간정책을 서울백서 등 기존의 5개 분류로 구분한 후, 스토리텔링으로 재해석을 통해 정책 간 연계성 부각

□공간에 실현되는 정책을 중심으로 제도, 정책, 관광, 행사 등을 연계

- 개별 공간정책을 통합․연계하며 이해하기 쉽게 제작

□시정방향을 반영한 스토리텔링으로 전체 공간정책을 일관된 논리로 홍보

□통합된 구조 속에서 알기 쉽게 이야기되도록 네이밍 및 카피라이팅 등 검토

- 투어 프로그램 등 창의적 홍보 전략으로 활용도 극대화

□공공의 정책과 민간의 아이디어를 접목한 창의적인 정책홍보전략 마련

추진경위

2

❍ ‘17.02.28.	: 서울시 공간정책의 입체적 홍보전략 구축계획(행정2부시장 방침 제45호)

❍ ‘17.05.29.	: 용역계약, 착수

❍ ‘17.06.02.	: 착수보고

❍ ‘17.08.10.	: 중간보고

변경계획

3

❍ 중간보고 시 준공기간 연장 검토 요청

❍ 서울시 공간정책투어 맵 및 스토리북 판형에 대한 재검토 및 디자인 심의일정으로 인한 계약변영(용역기간 연장) 추진

※ 2017.08.17. 계약자로부터 합의각서 및 변경공정표 제출

❍ 주요변경내용 : 용역기간 연장(50일)

기정 ‘17.05.29.~08.31.(3개월) → 변경 ‘17.05.29.~10.20.(5개월)

※ 계약금액 등 기타사항은 변경 없음

❍ 연장사유

- 시민소통담당관에서 월 1회 시행하는 시정홍보물 심의(디자인심의, 심의계획(9월 중순 의뢰, 9월말 심의 예정)) 행정절차 진행에 따라 준공기한 연장 필요

- 공간정책투어 홍보물 활용의 실효성을 높이기 위해 투어맵과 스토리북을 모두 핸드북 사이즈로 제작하는 방안에 대해 추가 검토 요청

- 스토리북 크기를 조정하기 위해서는 기 제작된 100여개 정책의 일러스트를 수정 ․보완하고 판형의 조정이 필요

❍ 귀책사유 : 서울시

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

4

❍ 계약업체로부터 합의각서가 제출되었고, 용역내용의 충실을 기하기 위하여 용역기간 연장이 필요하다고 판단되므로, 관련 규정(지방자치단체 용역계약 조건)에 따라 2017년 10월 20일 까지 계약변경을 시행하고자 함

❍ 변경내용

구 분	기 정	변 경	비고
용역기간	‘17.05.29.~08.31.	‘17.05.29.~10.20.	50일 증가
계약금액	***********	***********	변경없음

향후추진계획

5

❍ ‘17.08.21. : 중간보고(2차), 추가 판형 검토사항 보고

❍ ‘17.08.23. : 투어맵 및 스토리북 추가검토 결과 보고

❍ ‘17.08.25. : 디자인 심의(투어맵)

❍ ‘17.09.01. : 투어맵 인쇄, 홍보 활용

❍ ‘17.09.	: 디자인 심의(스토리북)

❍ ‘17.10.20. : 용역 준공

붙 임: 1. 용역계약기간 변경 의뢰서 1부

2. 합의각서 1부

3. 예정공정표(변경) 1부

4. 중간보고회 개최결과 1부.  끝.