투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인(가설휀스설치 외 4건))

1.업무지시현장:  여의교 확장공사 경서산업(주), 여의교 확장공사 주식회사 천일, 여의교 확장공사 케이에스엠기술(주), 여의교 확장공사 광혁건설(주)

2.작성일자: 2017-08-22 15:08:12

3.근거

가. 여의램프 제2017-104(2017. 4.17.)“가설휀스 설치 실정보고”

나. 여의램프 제2017-109(2017. 4.18.)“지장물 이설 실정보고”

다. 여의램프 제2017-107(2017. 4.17.) “샛강역사 안전점검 실정보고”

라. 여의램프 제2017-106(2017. 4.17.)“워킹타워 설치 실정보고”

마. 여의램프 제2017-105(2017. 4.17.) “CCTV 설치 실정보고”

4. 위와 관련 실정보고한 5건에 대하여 승인하오니 설계변경 반영하여 주시기 바랍니다.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							남만조			교량건설과장					08/23 박용택
협조자
시행			토목부-17512									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8 프리미어 플레이스빌딩12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2579						/전송			02-3708-2599					/													/	부분공개(5)