투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(Pile천공 토질 및 흙막이공법 변경 관련 실정보고 승인 통보)

1. 업무지시현장 :  하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 한신공영(주), 하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 주식회사 동일기술공사

2. 작 성 일 자 : 2017-08-22 15:08:53

3. 지 시 내 용

가. 하남 제17-366호(2017.05.13.)호와 관련입니다.

나.「하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사」관련 “본선1구간 중앙 Pile

천공구간 토질 및 흙막이공법 변경”에 대해 귀 건설사업관리단 보고내용과 같이 승인하니 공사진행에 만전을 기하여 주시고, 공사비는 추후 정산 후 설계에 반영될 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다. 끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							한재호			주무관					조규양					궤도과장					08/23 최진규
협조자
시행			도시철도토목부-10884									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-772-7102						/전송			02)772-7306					/	jh1004@seoul.go.kr												/	대시민공개