문서번호	방재시설부-14716
결재일자	2017.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
임성은		신용우	08/24 남궁용
협조	치수시설과장		조성만
	주무관		박중모

『청계천생태환경개선공사 2단계』

공사현장 실정보고사항검토 보고

2017. 8

도시기반시설본부

[방재시설부]

『청계천생태환경개선공사 2단계』

공사현장 실정보고사항검토 보고

『청계천 생태환경 개선공사 2단계』 조경공사중 진출입로 주변 안내시설물과 경사로하부 차폐식재에 대한 실정보고 사항을 검토후 보고드림.

- 관련근거 : 시설관리공단 공사감독3처-7043(2017.08.22.)호

공사개요

□ 공 사 명 : 청계천 생태환경 개선공사(2단계)

□ 공사위치 : 청계천(청계광장 ~ 중랑천 합류부)

□ 공사규모 :

∙ 경사로 신설 2개소, 홍수방지벽 설치 145m, 산책로 정비 3,246m

∙ 하상차수제 천공 2,853공, 식생방틀 191개소, 돌무더기 92개소

∙ 여울보 및 징검다리 개선 12개소, 둔치 관목외 1종 식재 1식

□ 공사기간 : 2016. 8. 26 ~ 2018. 2. 25

□ 도 급 비 : 2,080백만원

□ 시공사/감독기관 : 충정종합건설(주)/서울특별시시설공단

보고내용

□ 유관기관 요청사항(하천관리과-10475호, 2017.06.30)

구 분	요청사항	검토결과	비 고
진출입 경사로	**************************************	******************** *************************** *********************************** ******************************* ******************************** ******************************* ****** ********************************** *********************************** ******************************* ******************************** ******************************* *************************************

□ 개략공사비(조경부분)

구 분	금 액 (천원)					비 고
	당 초	실정보고			변 경
		전 회	금 회	누 계
5. 진출입경사로	******	*	********	********	******
6. 보식 조성	******	*	*	*	******
7. 홍수방지벽	*****	*	*	*	*****
순공사비 계	******	*	********	********	******
제 경 비	******	*	********	********	******
공 급 가 액	******	*	********	********	******
부 가 세	*****	*	********	********	*****
도 급 액	******	*	********	********	*******

※ 단가적용 :　********************************************

****************************************************

감독기관 의견

□ 진출입경사로에 대한 현장여건, 단가, 시설물 및 수목 규격에 대한 검토결과 적정 함

검토결과

○ 본 실정보고건은 『청계천 생태환경개선공사(2단계)』시행중 본사업 의뢰기관인 서울특별시 하천관리과에서 청계천 제2경사로 설치에 따른 합동점검결과를 현장여건에 맞게 반영한 사항으로

○ 감독기관의 의견과 같이 현장여건 및 설계대가 기준이 적합하고   낙찰율을 적용한 증액이 5,000만원 이하로 설계변경 심의 없이 시행할 수 있으므로

○ 추후 설계변경시 반영하도록 감독기관에 통보하고자 합니다.

붙 임 : 공단 실정보고 등 관련서류 1부.  끝.