투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연장(2차)에 따른 변경계약 요청

1. 녹지관리과 – 4063호(2017.8.24)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진 중인 ｢광나루한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 실시설계용역｣과 관련하여, 아래와 같이 준공기한 연장(2차)코자 하오니 변경계약 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

- 용 역 명 : 광나루한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 실시설계용역

- 용역기간 : 2017. 3. 21 ~ 8. 25 (당초 5. 29)

- 용 역 비 : ********

- 용 역 사 : *********

나. 준공기한 연장 : 88일 연장

구 분	용 역 기 간	용역비	비고
당 초	2017. 3. 21 ~ 5. 29	변동없음
1차 변경	2017. 3. 21 ~ 8. 25
2차 변경	2017. 3. 21 ~ 10. 24

다. 귀책소재 및 지체상금 부과 여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과.

붙임 : 준공기한 연장(2차) 검토보고서(방침서) 1부.  끝.

	녹지관리과장
★주무관	김대호		녹지관리과장	전결 08/24 문경재
협조자
시행	녹지관리과-4075	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02)3780-0833	/전송	02)3780-0745	/	wood91@seoul.go.kr	/	부분공개(5)