문서번호	기획관리과-8033
결재일자	2017.8.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	기획관리과장	데이터센터소장
박아름	김안철	08/25 김현규

항온항습기 교체 계획

2017. 8.

데 이 터 센 터

(기획관리과)

항온항습기 교체 계획

내구연한 경과에 따른 노후화로 성능이 저하된 항온항습기를 교체하여 안전성 및 효율성 확보로 최적의 공조환경을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 항온항습기 교체

○ 교체대수 : 1대

○ 구입방법 : 조달구매(3자단가계약)

○ 납품기한 : 납품요구일로부터 60일

○ 소요예산 : 42,289천원(조달수수료 별도)

- 예산과목 : 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리, 데이터센터	청사시설 유지보수, 자산및물품취득비

□ 추진계획

○ 추진내용 : 항온항습기 25대 중 1대 교체·설치

계	내구연한 미경과	내구연한 경과			비고
		계	미사용	사용
25	21	4	3	1	내구연한 경과 장비 중 현재 사용 중인 장비 1대 교체

※ 항온항습기 내구연한 : 9년

○ 구매규격 : 세부규격은 붙임 참조

장비번호	위치	냉동능력	냉·난방능력	가습능력	냉각방식	송풍방식
3-7	3층 C-zone	30RT	105.49kW, 12kW	15L/h	공냉식	하향식

□ 추진방법

○ 조달우수제품으로 지정된 항온항습기 구매

- 근거 : 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제14조 제1항 및 같은법 시행령 제13조

○ 운전비용 절감을 위한 헌열제어 에너지절약형 선정

○ 오존층 보호를 위한 친환경 냉매(R-407C) 적용제품 선정

□ 추진일정

○ ’17. 8. 25.	:	물품매입요구서 등록
○ ’17. 9. 11.	:	제작도서, 예정공정표 및 반입계획 승인
○ ’17. 9. 18.	:	신규 장비 납품 및 기존장비 철거
○ ’17. 10. 13.	:	시운전 및 현장정리
○ ’17. 10. 25.	:	납품 완료

□ 행정사항

○ 철거한 항온항습기는 하반기 불용처분 계획에 따라 처리

붙 임 : 1. 항온항습기 설치현황 1부.

2. 항온항습기 설계서 및 규격서 1부.

3. 항온항습기 물품상세내역 및 배치도 1부.