투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 기간연장 승인 통보(문래동 지식산업센터)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 삼창디엔씨 SC********3(2017.8.23.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통신호기 원인자부담공사 공사기간 연장요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 문래동 지식산업센터 트리플렉스 주변 교통신호기 공사

나. 공사장소 : 영등포구 문래동3가 46번지 주변

다. 원 인 자 : ㈜삼창디엔씨

라. 감 리 사 : ㈜트래픽스

마. 시 공 사 : ㈜신흥트래픽

바. 변경내용 및 요청 : 토목공정 지연으로 인한 공기연장 요청

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	승인통지일 ~ 2017.08.31..	승인통지일 ~ 2017.09.29.	29일 증

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	(주)삼창디엔씨,(주)신흥트래픽,(주)트래픽스
주무관	고두규		주무관	정경성		기전과장	08/25 박재경
협조자
시행	기전과-11324	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개