투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	「서울혁신파크 1단계 조성공사 」변경계약 의뢰

우리 본부가 사업시행 중인 「서울혁신파크 1단계 조성공사」에 대하여 아래와 같이 변경계약(총차 및 2차기간)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울혁신파크 1단계 조성공사

나. 공사기간 : 총차 : 2016. 12. 30 ~ 2017. 8. 29

2차 : 2017. 2. 17 ~ 2017. 8. 29

다. 계약금액 : 9,547,399천원(2차 : 8,635,855천원)

라. 계 약 자 : ㈜씨스페이스외 2개사

마. 계약변경 내용

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	총차	2016.12.30 ~ 2017.08.29	2016.12.30 ~ 2017.12.15	108일 연장
	2차	2016.02.17 ~ 2017.08.29	2016.02.17 ~ 2017.12.15	108일 연장
계약금액	총차	9,547,399,000원	9,547,399,000원	변경없음
	2차	8,635,855,000원	8,635,855,000원	변경없음

바. 예산과목 : 사회혁신기획관 사회혁신담당관, 사회문제해결을 위한   사회혁신의제 발굴시행, 사회혁신기반조성 및 성과확대, 서울혁신파크 조성사업, 시설비

붙임 : 1) 검토 보고서 1부.

2) 총차 및 2차공사기간 연장요청 1부.

3) 준공기한연장의뢰서 1부.

4) 합의각서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	정호기		복지시설과장	조영수		건축부장	08/25 김진용
협조자	경리과장	최정수
시행	건축부-14736	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2652	/전송	02-3708-2659	/	bluenight@seoul.go.kr	/	부분공개(7)