상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(보인중학교외 12개소 음수대 급수시설 개선공사)

1. 우리 사업소에서 시행하고 있는 「보인중학교 외 12개소 음수대 급수시설 개선공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 보인중학교 외 12개소 음수대 급수시설 개선공사

나. 공사개요 : D=15㎜～30㎜, L=1337m

다. 공사기간 : 2017.04.21. ～ 2017.08.30.

라. 계약상대자 : (주)길운이엔지 대표 김공철

마. 계약금액

(단위:원)

당 초	변 경	증, 감
34,927,180	54,820,000	증)19,892,820

바. 설계변경 및 정산사유 : 계약물량 증·감 사항 발생, 보험료 정산 등

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(음수대설치사업)

2017.08.25.

추산필

행정지원과

NO-7831(증액)

붙임 : 1) 설계변경 심의서 1부

2) 설계변경 내역서 1부. 끝.

주무관	조봉구		★주무관	박지숙		급수운영과장	전명수		강동수도사업소장	08/25 代박성주
협조자	주무관	임인택		주무관	송종학
시행	급수운영과-15112	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5172	/전송	02-3146-5189	/		/	대시민공개