문서번호	기전과-9539
결재일자	2017.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기전과장	서부도로사업소장
안광순	양영민	08/28 한동근

『 덕수궁 돌담길 회복사업 전기공사 』

설계 변경 검토 보고

2017. 8.

서부도로사업소

(기전과)

『 덕수궁 돌담길 회복사업 전기공사 』

설계 변경 검토 보고

『 덕수궁 돌담길 회복사업 전기공사』신규 공종 발생으로 인한 물량 증·감이 발생하여 설계 변경 시행코자 함.

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 덕수궁 돌담길 회복사업 전기공사

○ 도 급 자: ********************

○ 공사금액: ****************************

○ 공사기간: 2017.6.7. ~ 2017.8.30.

○ 공사규모: 경관조명 120등, 보안등 5등 설치

□ 설계 변경

○ 설계변경 사유 : 물량 증·감 및 신규공종 추가

∙ 물량 증·감

- (메인 분전반 설치공사) 전주 입상 케이블 물량 증가

∙ 신규 공종

- (메인 분전반 설치공사) 경관조명 분전반 부속기기 추가

- (지중등 설치공사) 경관조명 하우징 배수 케이블 추가

- (지중등 설치공사) 경관조명 케이블 설치 공간 굴착 추가

- 중구청 경관조명 및 보안등 분전반 이전 설치공사 추가

○ 설계변경 내용

공종 (품명)		당초내용	변경내용
메인분전반 설치공사	케이블	10m	분전반 전원 전주 입상분 포함 총 20m
	KIV 전선	없음	전주 입상분 총 20m
	강제전선관	“	전주 입상분 총 8m
	AL DUCT	“	입상관 고정부속물 5EA (30×60 2EA, 30×40 3EA)
	기타 부속기기	“	원활한 유지관리를 위해 누전차단기 5EA, 선로감시기 1EA 등 부속기기 추가
지중등 설치공사	후렉시블 전선관	“	경광조명 하우징 내부 배수를 위한 후렉시블 전선관 48m 및 커넥터 120EA 추가
	콘크리트 경계블럭	“	돌담길 진입로 화단측 경관조명 고정 기초 24EA
	관로터파기	“	경관조명 및 케이블 설치 공간 확보를 위한 114m 관로터파기 추가
중구청 보안등 분전반 이전 설치공사		“	중구청 보안등 및 경관조명 분전함 기초 2EA 철거 후 경관조명 분전함 1EA 이설, 중구청 보안등 분전함은 신설 보안등 분전함과 통합

○ 설계변경(총괄)금액

구분		금액 (원)			비고
		당초	변경	증,감
총공사비		97,076,950	106,610,000	9,533,050
도급비	공급가액	88,251,773	96,918,182	8,666,409
	부가가치세	8,825,177	9,691,818	866,641

○ 예산과목: 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리,

기전시설물관리(도시개발특별회계),

덕수궁 돌담길(영국대사관 주변) 회복, 시설비

□ 보고자 의견(조치 계획)

○ 상기 본공사에 반영되지 않은 신규 추가 공정과 물량 증․감을 설계 변경하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임: 1. 설계변경내역서 1부.

2. 원가 계산 검증확인서 1부.  끝.