문서번호	설비부-14540
결재일자	2017.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
성호준		유병기	08/28 권오식
협조

만리재로보행환경개선 전기공사

교통신호 실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

도시기반시설본부

(설비부)

만리재로보행환경개선 전기공사

교통신호 실정보고사항 검토보고

만리재로 보행환경개선 전기공사의 교통신호 관급자재에 대한 실정보고사항을 검토하고 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 만리재로 보행환경개선 전기공사

○ 공사규모 : 가로등(LED 100W, 10m) 159본, 교통신호기 5개소 개량

○ 공사기간 : `16.12.27. ~ `17.11.26.

○ 도 급 비 : 861백만원

○ 계 약 자 : (합)고려공업기업사

○ 감 리 자 : 대영유비텍㈜(교통신호분야)

Ⅱ		실정보고 내용

□ 관련근거

○ `17.07.25. : 현장조사 결과 및 관급자재 소요수량 보고

□ 주요내용

○ 유지관리부서(서부도로사업소) 요구사항 반영

○ 상태 양호한 신호기 재사용 등

- 변경내용

(단위 : 천원)

품 명	규 격	단위	수 량			금 액
			당 초	변 경	증․감	당 초	변 경	증․감
지 주	Φ315×Φ275mm×(6.4+3.13)m/부착대 9m,7m	본	0	2	증)2	0	9,340	증)9,340
지 주	Φ315×Φ275mm×(6.4+3.11)m/부착대 9m	본	0	6	증)6	0	23,340	증)23,340
지 주	Φ265×Φ215mm×(6.4+3.6)m/부착대 7m	본	0	9	증)9	0	27,990	증)27,990
지 주	Φ250mm×8m	본	20	0	감)20	29,146	0	감)29,146
지 주	Φ125mm×4m	본	4	7	증)3	2,047	-	증)4,550 도급반영(조달미등록)
부착대	융용아연도금 Φ100mm×9m	본	11	0	감)11	7,395	0	감)7,395
부착대	융용아연도금 Φ100mm×7m	본	11	0	감)11	6,298	0	감)6,298
교통신호제어기	600×450×1000mm	대	5	5	0	20,385	23,250	증)2,865
교통신호등	LED차량등1면4색(적/황/화살/녹	조	11	12	증)1	2,853	3,959	증)1,106
교통신호등	LED차량등1면3색(적/황/녹)	조	30	19	감)11	5,829	4,807	감)1,022
교통신호등	LED차량등1면3색(적/황/화살)	조	0	5	증)5	0	1,265	증)1,265
교통신호등	LED보행등 1면2색(적/녹)	조	25	18	감)7	2,993	3,006	증)13
교통신호등	보행신호등 보조장치(숫자)	개	23	14	감)9	3,791	3,290	감)501
합 계						80,737	100,247	증)19,510

Ⅲ		보고자 조치의견

○ 감리단으로부터 제출된 설계변경 실정보고 사항이 타당한 것으로 사료되어 우선 승인 및 관급자재 구매하고, 추후 설계변경시 계약변경코자 함

Ⅳ		향후계획

○ `17.08.  : 관급자재 구매

○ `17.09. ~ `17.11 : 공사시행

○ `17.11. : 공사준공

붙 임  1. 실정보고 사항 및 기술검토서 1부.

2. 관련공문 사본 1부.  끝.