투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	상도터널외 1개소 DMB재난방송 중계기 설치 설계변경 시행

『상도터널외 1개소 DMB재난방송 중계기 설치』와 관련하여, 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 상도터널외 1개소 DMB재난방송 중계기 설치

나. 공사기간 : 2017. 6. 30. ~ 2017. 9. 03.

다. 계 약 자 : ***********

라. 설계변경사유 : 상도터널 누설케이블 교체에 따른 물량 반영 등

마. 계약금액

구분	당초	변경	증감	비고
도급비	***********	************	************

바. 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 남산1호터널외 11개소 DMB중계설비설치, 시설비

붙임문서 :  설계변경 내역내역서 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김해중		기전과장	임태수		남부도로사업소장	08/28 이덕기
협조자
시행	기전과-4615	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	3284-5456	/전송	832-5470	/	win686@seoul.go.kr	/	부분공개(7)