문서번호	치수과-12448
결재일자	2017.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		하천관리팀장		치수과장		안전건설교통국장
임수열		代김현		代백원기		08/28 김재겸
협조

★ ◉

전농천 환경개선사업 실시설계용역 시행 계획

2018. 8.

성   동   구

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통·갈등 분야 고려사항		●	구민			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등발생요인			:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 □ ( ) 무 □
		●	서울시	:	유 ☑ ( ) 무 ☑
		●	기업	:	유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:	유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

전농천 환경개선사업 실시설계용역 시행 계획

전농천이 하천의 기능을 상실하고 악취가 많이 발생하여 인근 주민들에게 불편을 초래하고 미관을 저해하여 악취방지와 환경개선으로 생태회복 및 친수공간으로 조성하고자 함.

Ⅰ		전농천 개요

❍ 하 천 명: 전농천

❍ 위    치: 서울특별시 성동구 용답동

❍ 등    급: 지방하천(서울 고시 제2006-234호 2006.7.6)

❍ 규    모: 폭 42.5m, 연장 1.3km(천호대로~중랑천 합류부)

※ 총 연장 2.34km 중 성동구 구간 1.3km이며 900m 복개됨(군자차량사업소, 용답제2공영주차장, 용답교)

Ⅱ		추 진 경 위

❍ 2017.  2.  1 : 박정기 구의원 건의사항 송부

❍ 2017.  2. 13 : 구의원 건의사항 검토요청(성동구 → 서울시)

⇒ 여름철 하수 악취로 인해 주민 생활환경이 저해되고 있는 바, 전농천을 복개하여 악취를 해소하고 상부에 공공청사, 공원, 주차장 등 조성 요청

❍ 2017.  4.  5 : 구의원 건의사항 검토회신(서울시 → 성동구)

⇒ 전농천 복개는 하천법 제46조(하천안에서의 금지행위)에 해당하여 추진이 어렵고 악취해소를 위해 악취방지막 설치, 청소 등으로 저감토록 노력하겠음

❍ 2017.  6. 12 : 행정사무감사 건의(박정기, 박경준 구의원)

⇒ 전농천 악취방지대책 및 복개(환경개선) 요청

❍ 2017.  7. 20 : 2018년도 예산편성자료 제출(성동구 → 서울시)

Ⅲ		현황 및 문제점

❍ 전농천 전체구간 2.34km(동대문구 신답육교 ~ 중랑천 합류부) 중 성동구 구간은 1.3km(천호대로 ~ 중랑천 합류부)로 군자차량사업소, 주차장 등으로 900m는 복개되어 있으며, 400m만 하천으로 조성되어 사용중임.

❍ 전농천 상류에서는 하천수는 없이 복개천을 따라 생활오수만 흘러 용답교 하부 보에 오수가 정체되어 악취가 발생하며, 특히 강우 시에는 빗물과 오수가 용답교 하부 보를 월류하여 노출됨에 따라 악취가 심하고 미관을 저해하여 환경개선이 필요함.

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 중랑천 홍수방지 및 생태회복 종합계획에 의거 3개 기관(국토부, 서울시, 경기도)에서 시행하는 중랑천 본류 및 지천(지방하천)에 대한 하천기본계획 재검토와 병행하여 전농천 환경개선사업 실시설계용역을 시행(시비 1억).

❍ 악취저감, 수변시설 확충, 유지용수 확대, 저수호안 정비, 정수식물 식재, 전농천 복개 등을 종합적으로 검토하여 수리적으로 안전하고 주민들이 찾는 생태하천 및 친수공간으로 조성하고자 함.

Ⅴ		향 후 일 정

❍ 2018. 3.: 전농천 환경개선사업 실시설계용역 발주

❍ 2018. 4. ~ 12: 용역 시행

❍ 2019. 3. ~ 12: 공사 시행

붙임  위치도 및 현황사진 1부.