문서번호	도시철도사업부-9244
결재일자	2017.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신교통2과장	도시철도사업부장
박종덕		성원배	08/28 박동룡
협조
	★주무관		서현준

신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(4공구)

물가변동 및 투입계획 변동에 따른 계약변경 검토보고

(총괄 2회, 1차 3회)

2017. 8.

도 시 철 도 국

(도시철도사업부)

신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역(4공구)

물가변동 및 투입계획 변동에 따른 계약변경 검토보고

(총괄 2회, 1차 3회)

「신림선 도시철도 민간투자사업」전면책임감리용역(4공구) 계약자인 ㈜신성엔지니어링 외 2개사로부터 접수된 물가변동 및 투입계획 변경 등 으로 인한 계약기간 조정요청 검토 보고임

※ 신청공문 : ㈜신성엔 제2017-1668호('17. 8.21)

□ 용역개요

○ 위    치 : 관악구 서원동 승리교 ~ 관악산 주차장 앞

○ 연    장 : 2,471.1m (정거장 3개소, 환기구 1개소)

○ 감 리 사 : ㈜신성엔지니어링 외 2개사

○ 계약현황

(단위 : 천원)

구 분	계 약 일	계 약 기 간	계 약 금 액	비 고
총 괄	'11. 10. 25	‘11. 11. 01 ~ ’21. 09. 07	2,474,950
1 차	'11. 10. 25	‘11. 11. 01 ~ ’17. 09. 22	376,000	진행 중
잔 여		‘17. 09. 23 ~ ’21. 09. 07	2,098,950

□ 검토내용

○ 물가변동으로 인한 계약금액 및 건설사업관리기술자 투입계획 조정

○ 관련 근거

-「지방자치단체 용역계약 일반조건」제5절 (용역의 착수 및 보고), 제6절 (과업내용의 변경, 물가변동으로인한 계약금액의 조정)

-「지방자치단체 용역계약 특수조건」제8조 (물가변동으로 인한 계약금액 조정)

-「신림선 도시철도 민간투자사업 실시협약」제57조 (건설보조금)

- 입찰공고 (서울특별시 재무공고 제2011-1113호, 2011.09.21.)

물가변동으로 인한 계약금액 조정

○ 조정방법 : 소비자물가지수 변동률 적용

○ 조정시점 (소비자물가지수)

- 기준시점 : '11. 07. 31 ( 94.982%) - 입찰공고에 명시된 기준

- 비교시점 : '17. 06. 30 (102.670%) - 준공(기성)금액 청구 직전 분기말

※ ‘15년 기준 소비자물가지수 개편 결과(100.000%) - 2016.12.30. 통계청 공표

○ 소비자물가지수 변동률(E/S) : 8.09%

【변동률 산정】

비교시점('17.06.30) 소비자물가지수 – 기준시점('11.07.31) 소비자물가지수	×	100%
기준시점('11.07.31) 소비자물가지수

102.670 – 94.982	×	100%	=	8.09%
94.982

○ 소비자물가지수 변동률(E/S) 적용현황

(단위 : 천원, 부가세 별도)

구 분	당 초 ➀	물가변동 대상금액산출						변동율 ➄	물가 변동액 ➅ (➃ x ➄)	변경금액 ➆ (➀+➅)
		조정대상 금액 (준공) ➁	비 대 상 금 액				물가변동 대상금액 ➃ (➁ - ➂)
			1차 기성	손해배상 공제	부가세	소 계 ➂
총 괄 (2회)	2,252,702	354,220	80,000	3,950	24,570	108,520	245,700	8.09%	19,800	2,272,502 증)19,800
1 차 (3회)	342,230	354,220	80,000	3,950	24,570	108,520	245,700	8.09%	19,800	342,230 금액 변경없음 감리원 투입계획 조정

○ 계약금액 조정내역

(단위 : 천원, 부가세포함)

구분	계약금액	조정금액	물가변동분	투입계획 조정	변경계약금액
총 괄 (2회)	2,474,950	-	증 21,780	-	2,496,730
1 차 (3회)	376,000	-	증 19,800	감 19,800	376,000

건설사업관리기술자 투입계획 변경(조정)

○ 투입계획 조정 현황 (E/S반영, 투입계획 변경)

- 총괄 용역기간 : 당초 60개월, 변경 66개월 (증 6개월)

□변경사유 : 공사기간('17. 2. 3 ~ '22. 2. 2)을 감안하여 감리원 투입기간 재조정

※ 실제 감리투입일 : '16. 9. 8 (감리업무 수행을 위한 선투입)

- 1차 용역기간 : 당초 12.7개월, 변경 12.1개월 (감 0.53개월, 16일)

구 분		총 괄 용 역			1 차 용 역			비 고
		당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
계		222.30 인․월	222.30 인․월	-	32.820 인․월	30.980 인․월	감) 1.840인․월
기술지원감리원		22.20 인․월	22.20 인․월	-	3.280 인․월	3.090 인․월	감) 0.190인․월
상주감리원		200.10 인․월	200.10 인․월	-	29.540 인․월	27.890 인․월	감) 1.650인․월
토목	수 석 감리사	2016.09.08 ~ 2021.09.07 (76.26인월)	2016.09.08 ~ 2022.03.07 (83.86인월)	증) 7.60인․월 (6.0개월)	2016.09.08 ~ 2017.09.22 (15.86인월)	2016.09.08 ~ 2017.09.06 (15.20인월)	감) 0.660인․월 (16일)	총괄
	감리사	2016.10.07 ~ 2021.06.06 (56.00인월)	2016.10.07 ~ 2022.03.07 (65.02인월)	증) 9.02인․월 (9.0개월)	2016.10.07 ~ 2017.09.22 (11.52인월)	2016.10.07 ~ 2017.09.06 (11.00인월)	감) 0.520인․월 (16일)	보조
	감리사보	2017.07.01 ~ 2020.03.01 (25.41인월)	2017.07.03 ~ 2021.01.17 (33.72인월)	증) 8.31인․월 (10.5개월)	2017.07.01 ~ 2017.09.22 (2.16인월)	2017.07.03 ~ 2017.09.06 (1.69인월)	감) 0.470인․월 (16일)	보조
	감리사보	2017.11.01 ~ 2020.06.13 (24.93인월)	-	감) 24.930월 (31.4개월)	-	-	-	보조
건축	감리사보	2019.11.05 ~ 2021.09.07 (17.50인월)	2020.05.06 ~ 2022.03.07 (17.50인월)	-	-	-	-	보조

책임감리용역 계약 변경 현황

구 분	당 초		변 경		비 고
	계약기간	계약금액	계약기간	계약금액
총 괄 (2회)	`11.11.01 ~`21.09.07	2,474,950	`11.11.01 ~`22.03.07	2,496,730	□계약기간 : 변경 (증 6개월) □계약금액 : 변경 (증 21,780천원) *사유 : 감리원 투입계획 조정 및 소비자물가지수 변동률 반영
1 차 (3회)	`11.11.01 ~`17.09.22	376,000	`11.11.01 ~`17.09.06	376,000	□계약기간 : 변경 (감 16일) □계약금액 : 변경 없음 *사유 : 감리원 투입계획 조정

□ 검토결과

○ 상기 검토내용과 같이 소비자물가지수 변동률(8.09%) 및 건설사업기술관리자 투입계획 변경에 따라 용역기간 동안 효율적인 과업수행을 위해 ‘총괄’ 및 ‘1차 용역계약’을 변경하고자 함

- 변경 내용

(단위 : 천원, 부가세포함)

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
계약 기간	총 괄	`11.11.01~`21.09.07	`11.11.01~`22.03.07	증) 181일
	1 차	`11.11.01~`17.09.22	`11.11.01~`17.09.06	감) 16일
계약 금액	총 괄	2,474,950 천원	2,496,730천원	증)21,780
	1 차	376,000 천원	376,000천원	-

붙  임  1. 감리단 계약변경 요청서(공문) 1부.

2. 검토의견서 1부.

3. 감리설계 변경현황 1부.

4. 변경 설계서(총괄2회)

5. 변경 설계서(1차3회) 1부.

6. 소비자 물가지수 자료(2015년 기준) 1부. 끝.