투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	변경계약 및 공기연장 의뢰(세운상가 활성화 기계설비공사)

우리 본부에서 추진 중인 『세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 기계설비공사』 관련, 계약변경 사항이 있어 아래와 같이 변경계약 및 공기연장 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 세운상가 활성화를 위한 공공공간 조성 기계설비공사

나. 계약자 : ㈜을화 대표 서 경

다. 계약기간: 2016.04.04. ~ 2017.08.31.

라. 계약변경 사항                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
계약금액	273,809,800	322,637,700	증)48,827,900
공사기간	2016.04.04.~2017.08.31.	2016.04.04.~2017.09.20.	20일 연장

마. 변경계약 사유 : 사업주관부서 요청사항 및 현장여건 변경사항 반영

바. 공기연장 사유 : 선행공정 지연에 따른 공사기간 연장

(지체상금 미부과)

붙 임 :  1) 계약변경(공기연장) 검토 보고 1부.

2) 변경내역서, 합의각서, 제비율검증표 각1부.  끝.

	설비부장
★주무관	이호완		건축설비과장	代이호완		설비부장	08/28 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-14539	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96) 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8627	/전송	02-3708-8659	/	lee5858@seoul.go.kr	/	부분공개(5)