상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신 (공릉배수지(5,6지) 내부방식공사)-폐기물

1. 이준 북부-1708-53(2017.8.29.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 위탁 감독중인 『공릉배수지(5,6지)내부방식공사』의 실정보고에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 공사감독업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공릉배수지 5,6지내 단면보수 및 그라인딩 작업시 발생한 폐기물 처리물량이 당초 설계물량보다 초과 발생한 폐기물로 인한 공원 미관저해 및 후속공정에 필요한 자재(시트,패널,도막 등)반입공간 확보가 필요한 실정으로 조속 조치함이 타당하므로,

나. 귀 사에서 제시한 방법으로 공사의 시급성을 감안 우리사업소 관내 폐기물 처리업체(년간단가업체)에 조치후 안전사고 예방 및 시공에 만전을 기하시고 추후 설계변경시 반영 조치 하시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	이준엔지리어링(주) 대표 나석근,신봉건설(주) 대표 최기병
주무관	최용진		급수운영과장	08/29 장종욱
협조자	주무관	김재영
시행	급수운영과-19416	(		)	접수		(		)
우	01137		/
전화	02-3146-3342	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개