문서번호	기전과-9681
결재일자	2017.8.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
최정화		전결 08/29 양영민
협조

도시고속도로 기능개선사업(망원초록길 구간) 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

1

2017.08.

서부도로사업소

(기 전 과)

도시고속도로 기능개선사업(망원초록길 구간)

설계변경 보고

도시고속도로 기능개선사업(망원초록길 구간)을 추진함에 있어   현장 여건을 감안하지 않은 내역 보완 및 관련기관으로부터 표지판

문안 수정 요청이 있어 이를 반영한 내역으로 설계변경하고자 함.

□ 관련근거

○ 기전과-8944(2017.08.10.)호 : 실정 보고

○ 여의도공원관리사무소-3629(2017.08.18.)호 : 문안 수정 요청

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 도시고속도로 기능개선사업(망원초록길 구간)

○ 공사위치 : 강변북로 망원초록길 구간

○ 공사내용 : 도로안내표지 신설, 이설 등 1식

○ 계약금액 : 금11,727,000원

○ 공사기간 : 2017.06.23. ∼ 2017.09.20.

○ 계약업체 : 공영이엔씨(주) 대표 조규태

□ 추진경위

○ 당초 동 사업 설계용역 업체인 ㈜천일이 납품한 설계도서로 계약업체를

선정 사업 추진함.

○ 설계도서와 현장여건 상이로 설계업체에 설계도서 보완 요청 및 보완된

설계도서로 주관부서(교통운영과)로 추가 소요예산에 대해 재배정 요청

⇒ 추가 소요예산 재배정(7,129천원)

○ 또한 기 제작 설치된 표지 문안을 수정해 달라는 여의도공원관리사무소

의 요청이 있어 이를 반영하고자 함.

□ 설계변경 내용

○ 변경금액 : 증7,943,000원(11,727,000원 → 19,670,000원)

○ 변경내용

- 물량 변경

∙ 도로안내표지판 부착대 제작 및 설치(증가) : 6개소

∙ 문안 수정(증가) : 고휘도 1.62㎡

∙ 문안 수정(증가) : 초고휘도 1.36㎡

※ 붙임 “설계변경내역서” 참조 : 신규 물량은 최저낙찰율 87.745% 적용

□ 설계변경 금액(총괄)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
도 급 비	11,727,000	19,670,000	증)7,943,000

○ 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통

및 안전관리 강화, 도로교통소통 개선사업, 시설비(401-01)

□ 조치사항

○ 설계변경으로 증액된 예산은 동 예산과목의 추가 재배정된 예산 및 낙찰

잔액을 사용코자 하며, 설계변경(금액)에 대하여 변경 계약 요청.

○ 표지판 문안 수정 사항에 대해서는 시공업체에 변경 시공토록 조치.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 도시고속도로 기능개선사업(망원초록길 구간) 실정 보고 1부.

3. 도로안내판 수정 요청(붙임 문서 포함) 1부.  끝.