투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(서울소방행정타운 건립 통신공사)

우리 본부에서 추진중인 『서울소방행정타운 건립(1단계) 통신공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울소방행정타운 건립(1단계) 통신공사

나. 공사금액 : 1,350백만원(1차 : 500백만원)

다. 공사기간 : `16.6.1. ~ `18.5.31.(1차 : `16.6.1. ~ `17.8.31.)

라. 계 약 자 : ㈜세명에스엠지

마. 설계변경 계약 의뢰 현황

(단위 : 원)

구 분	계약금액	변경금액	증․감	비 고
총 차	1,349,631,580	1,436,515,580	증)86,884,000
1 차	500,000,000	464,234,000	감)35,766,000

바. 설계변경 사유 : 현장여건 및 물가변동 금액 반영 변경

사. 예산과목 : 소방재난본부 소방행정과, 소방행정기반강화, 직무환경개선, 소방행정타운 건립, 시설비 및 부대비, 시설비(소방안전특별회계)

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 1부

2. 합의서 및 변경내역서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	성호준		열빛총괄과장	유병기		설비부장	08/29 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-14657	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8602	/전송	02-3708-8659	/	junilove@seoul.go.kr	/	부분공개(5)