투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도토목부장
(경유)
제목	936S1 환기설비 설치에 따른 922공구 물량변경 적용

1. 도시철도설비부-10424호(2017.8.25.)와 관련입니다.

2. 위 대호에 의해 922공구에 936S1환기시설의 기계분야 환기설비의 설치를 지시한 바, 『지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 계약금액 조정 및 차수공사 물량조정 검토보고(총괄4회, 6차1회)』(도시철도토목부-13911호, 2015.11.3.)시 922공구에서 삭제되었던 936S1 본선환기구내의 기계분야 환기설비를 복원하여 물량변경을 적용하여 주시기 바랍니다.

○ 변경 내역

장비명	규격	물 량		비 고
		변경전	변경후
송 풍 기	3,070㎥/min	-	2	936S1
송풍기댐퍼	3,000×3,000	-	2	〃
소 음 기	3,000×3,000×3,000	-	4	〃
브라스트댐퍼	4,000×2,500	-	2	〃

붙임 : 지하철9호선3단계 건설공사 936S1본선환기구 환기설비 설치 추진. 1부. 끝

	도시철도설비부장
주무관	허웅		설비공사과장	황영일		도시철도설비부장	08/30 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-10622	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2210-1527	/전송	02-2210-1536	/		/	대시민공개