문서번호	인재기획과-12702
결재일자	2017.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
강상천		이창희	08/30 원권식
협 조

창의관 강의실 내부 결로 보수 계획

2017. 8

인재개발원

인재기획과

창의관 강의실 내부 결로 보수 계획

창의관 1층 강의실 결로현상이 발생 결로수로 인한 습도증가, 마감재 오염 및 공팡이 발생 등의 문제로 강의 진행에 불편이 발생 결로현상을 보수하고자 함

Ⅰ		현 황

○ 현 황

- 강의실 내부 : 결로현상 발생, 결로수 유입

· 내부 마감재 오염 및 곰팡이 발생

○ 보수방안 (내부보수)

- 결로보수 : 내부 복도측 환기창 설치

- 마감재 교체 및 곰팡이제거, 도색 보수

※ 내·외부 근원 보수 : ‘17년도 확보예산 부족으로 ’18년도 상반기 추가 보수 예정

Ⅱ		소요예산

○ 소요예산 : 18,370천원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 인재원청사 보수․보강, 시설비(401-01)

Ⅲ		추진계획

○ 2017. 8.14~8.18 : 연결통로 설치방안 검토

○ 2017. 8.21~8.25 : 설계도서 적성

○ 2017. 8.28~9. 1 : 방침 및 공사발주

○ 2017. 9. 4~9. 8 : 공사계약 및 착공

○ 2017. 9. 9~9.18 : 공사 추진 및 준공(예정)