투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경에 따른 변경 계약 의뢰(도시고속도로 기능개선사업-망원초록길)

1. 기전과-9681(2017.08.29.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행 중인 “도시고속도로 기능개선사업(망원초록길 구간)”

의 설계 변경에 따른 변경 계약을 다음과 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명 : 도시고속도로 기능개선사업(망원초록길 구간)

나. 도급자 : 공영이엔씨주식회사 대표 조규태

다. 공사기간 : 2017.06.23.~2017.09.20

라. 설계 변경 내역

구 분		계 약 금 액(원)			비 고
		당 초	변 경	(증.감)
총 공 사 비		11,727,000	19,670,000	7,943,000
도급비	공급가액	10,660,909	17,881,818	7,220,909
	부가가치세	1,066,091	1,788,182	722,091
	계	11,727,000	19,670,000	7,943,000

마. 예산과목 : 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선,

교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통소통 개선사업, 시설비(401-01)

바. 설계 변경 사유

- 당초 동 사업 설계용역 업체인 ㈜천일이 납품한 설계도서로 계약업체를 선정 사업 추진하였으나,

- 설계도서와 현장여건 상이로 설계업체에 설계도서 보완 요청 및 보완된 설계도서로 주관부서(교통운영과)로 추가 소요예산에 대해 재배정 요청 ⇒ 추가 소요예산 재배정(7,129천원)

- 또한 기 제작 설치된 표지 문안을 수정해 달라는 여의도공원관리사무소의 요청이 있어 이를 반영함.

붙임 1) 설계변경 방침서(붙임 문서 포함) 1부.

2) 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	최정화		기전과장	전결 08/30 양영민
협조자	주무관	윤미란		관리단속과장	안근
시행	기전과-9709	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	300-8403	/전송	300-8410	/	cjh1121@seoul.go.kr	/	부분공개(5)