투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행(정산)-2016년 노후포장도로 정비공사(1구역)

우리사업소에서 시행중인 “2016년 노후포장도로 정비공사-1구역”에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2016년 노후포장도로 정비공사-1구역

나. 공사기간 : 2016. 4. 26. ~ 2017. 8. 30.

다. 도 급 자 : ㈜에스지공영  대표 이지형

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증, 감
총 공 사 비		3,042,387,750	3,103,921,700	증)61,533,950
도급비	공 급 가 액	1,251,545,455	1,263,490,910	증)11,945,455
	부가 가치세	125,154,545	126,349,090	증) 1,194,545
	계	1,376,700,000	1,389,840,000	증)13,140,000
관 급 비		1,516,245,750	1,522,331,700	감) 1,085,950
이 전 비		149,442,000	191,750,000	감)42,308,000

마. 공사기한 연장

- 당초 : 2017. 8. 30.   - 변경 : 2017. 9. 30.

바. 설계변경사유 : 저소음 포장 시공후 시험기간에 장기간 소요.

- 귀책 사유 : 서울특별시

사. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이화신		도로보수과장	김학동		북부도로사업소장	08/31 신응수
협조자	관리단속과장	박대군
시행	도로보수과-8664	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/
전화	944-5433	/전송	945-5072	/	hwas44@seoul.go.kr	/	부분공개(5)