문서번호	설비부-14804
결재일자	2017.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박병환		임현근	08/31 권오식
협조

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

지하차도 통합배선공사 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

지하차도 통합배선공사 실정보고

「동부간선도로 확장(3공구) 통신공사」와 관련하여 책임건설사업관리기술자로 부터 지하차도(상도▪장암) 통합배선공사에 따른 실정보고가 있어 검토하고 보고드림

□ 관련근거

□ 동삼감 제2017-125(2017.8.31.)호---동부간선도로 확장(3공구)

지하차도 통합배선공사 실정 보고 승인요청

□ 공사개요

□ 공 사 명: 동부간선도로 확장(3공구) 통신공사

□ 공사규모: 동부간선도로(상계주공16단지~의정부시계) 2.25km확장

CCTV설비(10대), VMS 이설(1대), VDS신설(5대)

□ 공사기간: ***************************

□ 도 급 액: ***********

□ 시 공 사: ***********************

□ 추진경위

□ 2015.04: 통신공사 계약(제일정보통신(주)재계약)

□ 2017.04: 통신(방음벽구간 등)공사착공

□ 2017.05: 통신공사 완료(1차분)/이엔트컴(주) 타절준공

□ 2016.08: 지하차도 통합배선공사 실정보고

□ 검토내용

□ 동부간선도로 확장(3공구) 상도지하차도 전기실~장암지하차도 전기실까지       통합배선 공사 중 이엔트컴(주)의 타절준공으로 인한 잔여물량 반영 검토.

□ 물량 산출 내역

품 명	규 격	단위	설계량	준공량	잔여량	비고
강제전선관	ST16C, 22C,2 8C	m	114	21	93
폴리에틸렌전선관	CD-P 54mm	m	250	100	150
UTP케이블	Cat.6 0.5mm 4P	m	452	79	373
인터폰	6CCT	대	2	0	2
핸드홀	950x450x700	식	1	0	1
케이블	F-CV 2CX4㎟	m	138	12	126
접지선	4㎟	m	59	12	47
폴리에틸렌전선관	CD-P 36mm	m	308	194	114
폴리에틸렌전선관	CD-P 54mm(통신)	m	308	194	114
광케이블	SM 4C	m	666	0	666
광케이블 접속		코아당	16	0	16

□ 공사비 증▪감 현황                                       (단위 : 천원)

공 종	공 사 비			비 고
	당 초	변 경	증ㆍ감
통합배선공사	0	3,674	3,674
CCTV공사	0	7,462	7,462
직접공사비	0	11,136	11,136
간접공사비	0	7,033	7,033
도 급 비	0	18,170	18,170

□ 감리단 검토의견

∙ 동부간선도로 확장공사(3공구) 상도전기실 및 장암전기실 통합배선공사의 타절준공으로 인한 잔여물량을 반영한 사항으로 동일공종을 시행중인 통신공사업체에서 시행함이 적정한 것으로 판단됨.

□ 보고자 의견

∙감리단의 검토의견과 같이 상도전기실 및 장암전기실 통합배선공사 잔여물량 설계내역을 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 승인 하고자 하며,

추후 설계변경시 반영 하고자 합니다.

붙임  1. 감리단 실정보고 검토의견서  1부. 끝.