문서번호	시설보수과-7443
결재일자	2017.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
윤동원		08/31 代유태용
협 조
	주무관			유태용
	주무관			김승진
	주무관			김규춘

'17년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(제1~4차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

‘17년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(제1~4차)

관내 도로시설물의 손상, 파손부위에 대한 보수를 위하여 작업지시한 내역에 대한 작업완료 결과를 보고 드림

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2017년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가,IC-강서)

나. 공사기간 : 2017. 4. 24 ~ 12. 31

다. 계약금액 : 929,272,940원

라. 공사개요 : 포장보수 A=65a, 교면방수 A=1,400㎡ 신축이음보수

L=180m, 기타 1식

마. 계 약 자 : 이에스피건설 대표 강상수

2. 보고내용

가. 작업지시 및 완료

차수	근거	작업지시	작업기간	작업완료	비고
1차	시설보수과-4031	2017.5.08	2017.5.10.~6.30	2017.6.20
2차	시설보수과-4283	2017.5.16	2017.5.17.~6.30	2017.6.23
3차	시설보수과-4284	2017.5.16	2017.5.17.~6.30	2017.6.23
4차	시설보수과-4917	2017.6.09	2017.6.09.~8.14	2017.8.14

나. 작업지시 및 완료내용

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업지시내역	수량	완료내역	수량	비고
1차	1	목동교	하부슬라브 구간	콘크리트단면보수 주간 t=10mm, 천정	150㎡	콘크리트단면보수 주간,Eco terra,천정,t=10mm	150㎡
	2			콘크리트표면보수 주간,천장	138㎡	콘크리트표면보수 주간,Eco terra,천장	138㎡
	3	구로고가	교면 상부	차선도색	980m	차선도색	894m

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업지시내역	수량	완료내역	수량	비고
2차	4	오목교	P1	점검통로설치	76m	점검통로설치	75.6m
	5		A1,P1,P3,P4	강관배관 STS, 150A	4m	강관배관 STS, 150A	3.5m
	6	가리봉철도고가	보도육교 난간부	콘크리트표면보수 주간 t=0.6mm	103.4㎡	콘크리트표면보수 주간,Eco terra,벽체	41.2㎡
	7		보도육교 계단부	콘크리트단면보수 주간 t=30mm,	0.27㎡	콘크리트단면보수 주간,Eco terra, t=30mm	0.27㎡
	8		P8 중앙부	차수조인트설치	1.0m	차수조인트설치	1.0m
	9	개화IC	상하행선 슬라브	유도배수로 설치 STS, t=1.5mm	15.0m	유도배수로 설치 STS, t=3.0mm	4.6m
	10		날개벽	주간, 벽체,t=30mm	0.5㎡	주간,Eco terra, 주간,Eco terra,벽체,t=30mm	0.5㎡
3차	11	오금교	연석부	콘크리트단면보수 주간 t=20mm,	461.7㎡	콘크리트단면보수 주간,Eco terra, t=20mm,	415.4㎡
	12	도림교(구로)	P3	콘크리트단면보수 주간 t=20mm,	1.0㎡	콘크리트단면보수 주간,Eco terra, t=20mm,	1.0㎡
	13	공단IC	램프1,램프2,램프3	콘크리트표면보수 주간 t=0.6mm	223㎡	콘크리트표면보수 주간,Eco terra,천장	409.2㎡
	14		램프1,램프2,램프3	콘크리트단면보수 주간 t=10mm,	3.0㎡	콘크리트단면보수 주간,Eco terra,벽체 t=10mm	4.6㎡
4차	15	오금교	교대(A1) 하부 콘크리트 박락	단면보수 주간, t=30mm	0.5㎡	콘크리트단면보수 주간,Eco terra,벽체,t=30mm	0.5㎡
	16		교량 상부 교명주 기초 주변 박락	단면보수 주간, t=30mm	1.0㎡	콘크리트단면보수 주간,Eco terra,벽체,t=30mm	1.0㎡
	17	도림교	교대(A1) 측면 콘크리트 박락	단면보수 주간, t=30mm	0.5㎡	콘크리트단면보수 주간,Eco terra,벽체,t=30mm	0.16㎡
	18	공단IC	램프3 상부 빗물 채수	콘크리트 구멍뚫기 Φ100㎜	1ea	콘크리트 구멍뚫기 Φ100㎜	1ea
	19		본선 P2 상부 신축이음 차수판 파손	차수판 설치	1ea	차수조인트설치 Omega, 50~70#	1ea
	20	개봉철도고가	A2(공항방향) 연석 신축이음 차수판 파손	차수판 설치	1ea	차수조인트설치 Omega, 50~70#	1ea
	21		교각(P4) 콘크리트열화	표면보수	16㎡	콘크리트표면보수 주간, EG프로텍터, t=0.6mm,벽체	16㎡
	22		A2(오류IC방향)	상판보수-초속경	11㎡	상판보수-(350-교량-초속경)	11㎡
	23	개봉고가	A2(광명)통과제한높이 표지판 철거	긴급출동	1회	긴급출동	1회
	24		남단 보행도로 옆 가드레일 파손	가드레일 교체	2경간	가드레일 교체	2경간
	25	화곡고가	A1(신정동)통과제한높이 표지판 파손	긴급출동	1회	긴급출동	1회
	26	개봉교	A1,A2 캔틸레버 하부 폐관 정리	폐관 정리	1ea	폐관 정리 열연강판, t=3mm	3ea
	27		캔틸레버 단부 물끊기 노후 및 탈락	물끊기 설치	331m	물끊기공 철거 및 설치 AL-T형	221m
	28	구로1교	A2 대림2동 방향 배수관 탈락	배수관 보수 STS	6m	배수관 보수 STS, 70A	6m
	29	영등포로타리 IC	P5 여의도방향 2차선 후타보수	신축이음장치재설치 t=20cm,b=30cm	1.8m	신축이음장치재설치 t=20cm,b=35cm	1.8m

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업지시내역	수량	완료내역	수량	비고
4차	30	행주IC	행주대교방향 상행선 좌측 교명판 망실	교명판 설치	1.0ea	교명판 설치 420X260	1.0ea
	31		행주대교방향 상행선 좌측 교명판 노후	교명판 교체	1.0ea	교명판 교체 400X800	1.0ea
	32	개화교	상,하행선 방호책 상단 레일	델리네이터 교체	16ea	델리네이터 교체 단면 (가드레일용)	16ea
	33	여의2교	교면포장 부분 노후 및 파손	소파포장 복구	1a	다음 차수로 이월	-
	34		A1, P2 신축이음부 고무덮게 파손	차수판 설치	2ea	차수조인트설치 Omega, 50~70#	2ea
	35	광명교	A2 보도 접속부 콘크리트 파손	초속경 콘크리트 보수	0.5m3	초속경 콘크리트 보수 주간, 인력	0.5m3
	36		A2 보도부 콘크리트 파손	초속경 콘크리트 보수	0.6m3	초속경 콘크리트 보수 주간, 인력	0.6m3
	37	신월IC	A2 교명주 개포동방향	단면보수	0.7㎡	콘크리트단면보수 주간,Eco terra,벽체,t=30mm	0.7㎡

다. 작업완료 검수사진(2017.8.22)

구로고가차도 차선도색 완료 검수사진(1차)	오목교 점검통로 설치 완료 검수사진(2차)	오목교 강관배관 설치 완료 검수사진(2차)

가리봉철도고가 표면보수 완료 검수사진(2차)	오금교 연석단면보수 완료 검수사진(3차)	오금교 위치표지판 설치 완료 검수사진(3차)

공단IC 교각기둥 단면보수 완료 검수사진(3차)	개봉교 물끊기설치(노치) 완료 검수사진(4차)	개봉교 유해조류방지망 재설치 완료 검수사진(4차)

라. 개략공사비 : 333,824천원(세부내역 별첨)

3. 검토의견

- 작업지시 내용과 같이 이상없이 작업완료한 바, 추후 설계변경시 반영

하고자 함

별첨 : 1) 시공사 작업완료보고서 1부(종이문서)

2) 작업완료 보수사진 1부(종이문서). 끝.