문서번호	도로계획과-12551
결재일자	2017.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
전문관	광역도로계획팀장	도로계획과장
윤갑진	박영서	08/31 하종현

천호지하차도 철거·평면화 타당성조사 용역

계약금액 조정(정산) 검토 보고

2017. 8.

안전총괄본부

도로계획과

천호지하차도 철거·평면화 타당성조사 용역

계약금액 조정(정산) 검토 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 천호지하차도 철거·평면화 타당성조사 용역

○ 용역내용 : 천호지하차도 평면화 관련 자료 조사, 교통수요 예측 및
경제적·정책적 분석 등 사업 타당성 검토

○ 용역기간 : 2016.05.17 ~ 2017.09.30

○ 계약금액 : 87,604천원

○ 용역회사 : ㈜태조엔지니어링

□ 보고내용

○ 계약변경(정산)

- (당초) 87,604,000원 → (변경) 87,004,000원 (감 600,000원)

구 분			금 액	증·감
총 용 역 비		당 초	87,604,000원	감 600,000원
		변 경	87,004,000원
	공 급 가 액	당 초	77,763,000원
		변 경	77,763,000원
	손해배상공제료	당 초	514,000원
		변 경	514,000원
	부가가치세	당 초	7,827,000원
		변 경	7,827,000원
	자 문 비	당 초	1,500,000원	감 600,000원
		변 경	900,000원

- 사 유 : 자문비 정산에 따른 감액 조치

□ 향후계획

○ '17. 9월초 : 계약 변경 및 용역 준공

붙 임 : 1. 계약변경 요청공문 1부.
2. 계약변경(정산) 내역서 1부.  끝.