투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	「서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)」 총차변경 및 4차분 계약 의뢰

우리 본부에서 시행중인 「서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)」에 대하여 아래와 같이 총차 계약변경 및 4차공사 계약 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사(건축)

나. 공사기간 : 총차 : 2016. 5. 27 ~ 2017. 10. 21

다. 계약금액 : 6,385,142,930원

라. 계 약 자 : 금성종합건설주식회사

마. 총차 계약변경 내용

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	총차	2016.05.27 ~ 2017.10.21	2016.05.27 ~ 2017.11.21	31일 연장
계약금액	총차	6,385,142,930원	8,774,936,930원

바. 4차공사 계약

- 금    액 : 2,389,794,000원

- 공사기간 : 2017. 9. 01 ~ 2017. 11. 21

사. 예산과목 : 도시개발특별회계, 서울역일대활성화, 서울역 7017프로젝트, 서울역 7017프로젝트 추진, 시설비 및 시설부대비

붙임 : 1) 검토 보고서 1부.

2) 준공기한연기의뢰서 1부.

3) 총차 및 4차 공사 내역서 각 1부. 끝.

	건축부장
주무관	송옥의		건축관리과장	차무흥		건축부장	전결 08/31 김진용
협조자
시행	건축부-15160	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (프리미어플레이스빌딩 13층)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2651	/전송	02-3708-2659	/	sssoookkk@seoul.net	/	대시민공개