투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연장에 따른 계약변경 의뢰(기획전시실 전시환경 개선공사 실시설계 용역)

1. 전시과-3043(2017.8.31)호와 관련입니다.

2. 기획전시실 전시환경 개선공사 실시설계 용역과 관련하여 다음과 같이 준공기한을 연장 시행하고자 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약번호 : 2017070BBBO-00

나. 용역명 : 기획전시실 전시환경 개선공사 실시설계 용역

다. 계약자 : 건축사사무소 강희재(대표 : 강성원)

라. 변경내용

- 준공기한 : 2017. 9. 12까지 연장(10일)

- 계약금액 : 변경없음

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	2017. 7. 25 - 2017. 9. 2	2017. 7. 25 - 2017. 9.12	10일 연장

마. 변경사유

- 용역 자문회의 결과 실시설계 개선방안에 대한 전문가 자문의견을 성과품에 충실히 반영하고자 함

붙임 : 1. 준공기한 연장 계획 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	전시과장
★주무관	나신균		전시과장	08/31 박상빈
협조자
시행	전시과-3044	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 (신문로2가)	/	http://www.museum.seoul.kr/
전화	02-724-0150	/전송	02-724-0255	/	nsksk@seoul.go.kr	/	대시민공개