투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	『남산 잠두봉 주변 산사태 예방사업』 정산 설계 변경 시행

1. 녹지관리과-7161(2017.09.01)호와 관련입니다.

2.『남산 잠두봉 주변 산사태 예방사업』에 대하여 아래와 같이 정산 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 남산 잠두봉 주변 산사태 예방사업

나. 공사기간 :  2017. 08. 9 ~ 2017. 09. 5

다. 총사업비 : 금26,553,170원(금이천육백오십오만삼천일백칠십원)

- 도급 비 : 금10,042,500원(금일천사만이천오백원원)

- 관급 비 : 금16,510,670(일천육백오십일만육백칠심원)

라. 시 공 사 : ****************

마. 설계변경 내용 : 별첨 참조

바. 도급비 및 관급비 변경 내역

(단위 : 원)

구분		소요 금액			비고
		당초	변경	증
총 공 사 비		26,553,170	27,780,670	1,227,500
도급비	소계	10,042,500	11,270,000	1‘227‘500
	공급가액	9,129,545	10,245,455	1,115,910
	부가세	912,955	1,024,545	111,590
관 급 자 재 비		16,510,670	16,510,670	0

사. 예산과목 : 푸른도시국 산지방지과, 산림안전관리, 산림재해방지, 사방사업(계류보전), 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 : 1. 공사실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부. 끝.

주무관	김완수		녹지관리팀장	代김완수		녹지관리과장	09/01 김윤철
협조자	재무팀장	김기중
시행	녹지관리과-7624	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5944	/전송	02)3783-5949	/		/	부분공개(5)