문서번호	시설관리과-25045
결재일자	2017.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
시설관리팀장		주무관	시설관리과장		서부수도사업소장
이준호		강병국	김홍준		09/01 박영헌
협 조	주무관			양재덕
	주무관			신동철

- 제  안  자 : 이준호 팀장

- 실행계획자 : 이준호, 강병국, 신동철, 양재덕, 황재향

- 실  행  자 : 이준호, 강병국, 신동철, 양재덕, 황재향

상수도/소화전공사

병행 시범설치 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부수도사업소

상수도/소화전공사 병행 시범설치 결과 보고

배급수관 정비공사 구간내 존치하는 노후소화전에 대하여 소방서 진단 결과에 따라 병행시공(교체)하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		공사개요

□ 배급수관 정비공사

□ 공사명 : 은평구 역촌동 34-1번지외 3개소 배급수관 정비공사

□ 규  모 : D=20~300mm, L=1,249m

□ 기  간 : 2017. 05. 08 ~ 2017. 11. 03

□ 노후 소화전 현황

□ 위 치 : 은평구 역촌동 34-1호앞

□ 형 식 : 지하식 소화전 (원형변실)

□ 재 질 : 1992년도에 설치한 비내식성 회주철 소화전

Ⅱ		시범사업 추진실적

□ 소방서 이해설득

□ 유관부서인 은평소방서 재난관리과에 시범사업 설명(유선)

- 그동안 예산부족으로 소화전 보수의뢰 미조치 현황과 노후소화전으로 녹물출수 민원발생 등의 문제점을 설명하고,

- 금회에 우리사업소에서 진행중인 배급수관 정비공사 구간내 소화전에 대한 소방서 진단결과에 따라 병행 교체 건의.

․ 병행시공으로 포장복구비, 시공 및 자재비 등의 소방비 예산절감과 이중굴착, 단수 등의 시민불편 사항 개선사항 설명

□ 업무협의 관련문서 생성

- “공사시행에 따른 업무협조 요청(소화전관련)” : 시설관리과-24711

- “소방용수시설 보수 관련 현장확인 결과 보고” : 재난관리과-6250

- “노후소방용수시설 보수 의뢰” : 재난관리과-6251

- “소방용수관련 업무개선(안)을 위한 협조요청” : 급수운영과-20467

․ 2018년도 노후관 정비공사 예정구간 내 상수도공사와 병행할 수 있도록 사전 진단 후 보수요청할 수 있도록 업무협조 요청

□ 공사시행

□ 배급수관 정비공사 계약업체가 관부설 시 소화전 분기밸브를 교체하고,

- 배급수관 정비공사에는 단위공사로 소화전 설계 포함되어 있지 않음

□ 지하식 소화전은 년간단가 계약업체로 하여금 교체 작업지시하여 완료함

- 소화전의 보수나 신설은 해당 지역의 년간단가 공사계약 업체가 시행하고 있음(2017년 은평구관내 상수도공사-장기계속단가계약)

- 작업개요

․ 지하식소화전 교체 1개소,    ․ 일시 : 2017. 08. 30.

- 시공사진

Ⅲ		시범사업 분석 결과

□ 기대효과 발생

□ 병행시공으로 보행자, 교통, 먼지, 단수 등의 시민생활불편이 개선되고, 1회 굴착으로 두가지 시설물 정비하여 포장복구비 등 공사비 절감이 가능

- 별개 공사시 소화전보수에 약 400만원이 소요되나 병행시공 시 약 70만원 소요

- 그 소요되는 70만원 또한 대부분이 관급자재비임

□ 우리 본부에서 역점적으로 추진하고  “노후밸브 정비사업”과 함께 맑고 깨끗한 아리수 공급에 일조할 수 있으며,

- 수도사업소나 소방서 모두 윈윈할 수 있는 사업임

□ 노후 소화전으로 인해 소방서에서 시설물 점검 시 마다 녹물출수 민원이 수도사업소에 지속 반복되는 사항이 개선되고,

□ 시민의 소중한 생명과 재산을 지키는 중요 시설물인 소화전이 상시 사용 가능한 최적화 상태로 관리가 가능함

□ 횡단전개를 업무개선사항 필요

□ 상호간 사업계획 정보 공유

- 공사구간의 소화전을 소방서에서 사전 진단하고 예산 편성하여 상수도관과 병행 교체할 수 있도록 정보공유가 필요하며

- 이를 위하여 아래와 같이 개선사항을 의무화하는 제도적 장치가 필요

	현 행				개 선
◈ 별도계획 수립 및 사업추진 - 상수도사업본부 - 소방재난본부				◈ 배관교체공사에 소화전 진단 의무화 배관교체계획 통보(상수도)→공사구간내 소화전 점검 교체대상 선정(소방서)→ 예산편성 및 보수요청(소방서)→노후관 교체와 병행 소화전 공사 시행(상수도)

Ⅴ		향후계획

□ 시범사업 추진 분석결과에 의거 유관기관에 횡단전개가 가능하도록 법/제도 개선을 건의

- 상수도배관 교체와 소화전 병행시공 의무화

- 중앙정부(소방방재청-소화전, 환경부-상수도)와 서울특별시 소방재난본부에 건의