투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	용역 완수기한 연기 계약체결 통보(나들이공원 풋살경기장 조성사업 실시설계용역 시행)

시설과-5389(2017.08.31.)호와 관련, 다음과 같이 변경계약 조치하였음을 알려드립니다.

가. 용 역 명 : 나들이공원 풋살경기장 조성사업 실시설계용역 시행

나. 계약금액 : 20,900,000원(금이천구십만원)

다. 계약업체 : ********************

라. 완수기한 연기

- 당  초 : 2017.02.03. ~ 2017.08.31

- 변  경 : 2017.02.03. ~ 2017.11.30

붙임 : 1. 용역변경계약서 1부.  끝.

	공원운영과장
주무관	전정아		재무팀장	김기중		공원운영과장	09/01 김용중
협조자
시행	공원운영과-16047	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 (예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5933	/전송	02-3783-5929	/	jja70@seoul.go.kr	/	부분공개(6)