투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	방재시설부장
(경유)
제 목	하도급 변경계약 알림

「중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」관련 기계공사의 하도급 변경계약 내용이 책임건설사업관리기술자로부터 통보되어 아래와 같이 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 변경내용

금번 변경계약은 시운전 결과 나타난 개선사항 보완대책으로 도급자 자진 부담으로 추가 개선공사를 시행하기 위해 하도급자와 별도의 변경 계약(하도대금 증액).

나. 원도급 내역상 변경: 변경사항 없음

하도급 공종명	원도급 업체명	하도급 업체명	하 도 급 공사기간	원도급액 (원)		하도금액 (원)	하도급 비 율	비고
기계설비공사	지에스건설㈜	해원산업㈜	’16.07.01. ~’17.08.31.	당초	832,059,000	710,769,400	85.42%
				변경	832,059,000	710,769,400	85.42%

다. 원도급 내역 외 도급자와 하도급자간 별도 변경: 증액변동

(단위: 원)

구분	당초 계약금액			변경 계약금액			증감금액
	도급금액	하도계약 금액	하도 급율	도급금액	하도계약 금액	하도급율	도급 금액	하도계약금액	하도 급율
도급 내역 기준	832,059,000	710,769,400	85.42%	832,059,000	710,769,400	85.42%	- 변동없음 -
실 계약 기준	832,059,000	1,386,000,000	166.57%	832,059,000	2,691,040,000	323.42%		1,305,040,000
도급분 외 내역	-	675,230,600	-	-	1,980,270,600			1,305,040,000

※ 원도급 내역에 없는 도급분 외 금액은 하도급율 산정에서 제외함

붙임  1. 하도급 변경계약 관련 감리단 실정보고서 1부.

2. 하도급 변경계약 관련 자체 검토보고서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김인호		열빛총괄과장	전결 09/01 유병기
협조자
시행	설비부-14909	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8603	/전송	02-3708-8659	/	ijhw21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)